“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품변경계약체결[음식물 운반용 리프트 제작구매]

1. 총무과-2684(2022.2.24.)호와 관련입니다.

2. “음식물 운반용 리프트 제작구매” 건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결코자 합니다.

가. 당초 계약내용

계약건명	계약자	계약금액(원)	계약기간
****************	****** ******	*********	***********************

나. 변경 계약내용 : 납품기한 변경(기간 연장)(2차)

계약건명	계약금액(원)	계약기간		비고
		변경(전)	변경(후)
****************	*********	*********** *********	*********** ********

다. 변경사유 : 구내식당 신설 및 화장실 시설개선 공사 연기에 따른 관급자재 일부 연기

라. 조치사항 : 변경사항에 따른 관련 서류(합의서 등) 검토 후 계약체결

붙임 : 물품변경계약서(초안) 및 변경합의서 각 1부.  끝

주무관	최승영		재무회계과장	양연화		요금관리부장	02/25 안병희
협조자
시행	재무회계과-2399	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 서울시상수도사업본부 재무회계과	/
전화	02-3146-1234	/전송	02-3146-1209	/	plato@seoul.go.kr	/	부분공개(7)