투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(휴일작업 승인알림(월드컵대교))

1.업무지시현장 : 월드컵대교건설공사 주식회사 포스코건설

2.작 성 일 자 : 2022-02-25 10:02:53

3.지 시 내 용

가. 월드컵(감리)2022-187(2022.2.24.)호와 관련입니다.

나. 휴일작업 승인 요청에 대하여 아래와 같이 승인하오니 건설사업관리단에서는 공사장 품질 및 안전 관리에 최선을 다해 주시기 바랍니다.

□ 휴일작업 개요

○ 작업일시

- 휴일작업 :‘22.2.26.(토), 3.1.(화) (2일간)

○ 작업내용

- 휴일작업

‣ Ramp-B P2 파이프 그라우팅, Ramp-D P1 가시설 설치, P3 토사 굴착, P4 교각 터파기, 철근 조립대 설치 및 강제폼 조립, Ramp-H P5 토사 굴착, 가축도 톤마대 쌓기 및 지반개량, 우안 강교 조립장 야적 토사 반출, 안양천 자전거도로 차선도색 등

○ 건설사업관리자 근무 계획 : 붙임 문서 참조

○ 휴일작업 귀책사유 : 시공사.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이승주			토목총괄과장					02/25 김태중
협조자
시행			토목부-3166									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-3784						/전송			02-2133-1042					/	dltmdwn@seoul.go.kr												/	대시민공개