투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역외 1건」준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-3124호(2022.2.24.)와 관련입니다

2. 우리 부에서 시행 중인「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역외 1건」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역외 1건

나. 용역규모 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계(연결로 5개소, 지하차도 변경 등), ********** 등

다. 설계변경내역

구 분	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
용역기간	당초 : '17.8.7.~'22.02.28. 변경 : '17.8.7.~'22.05.31.	당초 : '17.8.11.~'22.02.28. 변경 : '17.8.11.~'22.05.31.
용역사	㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링,㈜지아이건설기술그룹, ㈜수성건설엔지니어링	㈜제일엔지니어링종합건축사사무소
용역금액	3,402,691,000원	389,526,000원

라. 설계변경사유 : ************따른 관계기관(한강유역환경청(하천계획과) 사전 협의 지연에 따라 설계 절차는 추진중이나 공공디자인위원회, 설계자문회의, 건설기술심의 등을 위한 최소 설계기간(3개월) 연장 필요

마. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임  1.   준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2.   건설사업관리 검토의견서 1부.

2-1. 합의각서(설계용역) 1부.

3.   설계감리 준공기한 연기요청서 1부.

3-1. 합의각서(설계감리) 1부. 끝.

	토목부장
주무관	김종혁		토목설계과장	한병찬		토목부장	02/25 代김태중
협조자
시행	토목부-3170	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/	mindle93@seoul.go.kr	/	부분공개(6)