문서번호	도시철도사업부-1915
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
국성훈		최문기	02/25 이철
협 조
	주무관			정광욱
	주무관			박은민
	주무관			김나현

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2,3공구) -

휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고('22년 3월)

2022. 2.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고('22년 3월)

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구) 관련 ´22년 3월 휴일 감리 근무계획 승인 요청(2,3감리)에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 근무 승인 요청내용

□ 관련 근거 : 신림선(2공구)22-39호('22.2.23.) … #붙임1

□ 휴일 근무 : 총 10일

- 3.1.(화), 3.5.(토), 3.6.(일), 3.9.(수), 3.12.(토), 3.13.(일), 3.19.(토), 3.20.(일), 3.26.(토), 3.27.(일)

□ 휴일 근무 계획

□ 관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

□ 휴일 근무 사유

- 주변 유동인구수 최소 시간을 감안하여, 작업을 신속하게 추진해 시민불편 해소에 만전

□ 적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681호, '13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 감리단 검토 의견

□휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 임을 명기(시공사)

□ 휴일 근무 주요내용 : 별첨 … #붙임2

□ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정 … #붙임3

□ 검토 결과

□ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 작업 승인 조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함

< 건설사업관리기술자 휴일 작업 승인 조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 민원사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 주요 작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 중대재해처벌법 시행에 따른 현장 안전관리(안전 매뉴얼 및 체크리스트 반복 학습, 공사장 위험요인 확인 등) 철저(시장 요청사항)

- 위험공종(가시설 해체, 복공 철거 등) 진행시 안전관리자 현장 입회하에 작업확행

- 감염병 위기 단계의 ‘심각’ 단계에 따라 코로나 19 예방 및 지역사회 확산 방지를 위한 ‘건설공사장 대응 지침’ 숙지 및 이행 철저

- 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 ‘사회적 거리 두기 지침’ 이행 철저

- 건설공사장내 노출된 상수도관 등 지하매설물 관리 철저

- 본부 안전관리과에서 안전사고 위험 현장 지적․안내와 관련하여 지적사항은 즉시 조치하고, 반복 지적되지 않도록 현장관리 요망

- 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 건설사업관리기술자 및 현장 공사 관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공 상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생 시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련 절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- 안전관리자 정위치 및 취약시간 관리 철저

- [근로자 안전 10계명], [안전시공 10대 항목] 준수 철저

붙  임 : 1. 휴일 감리 근무계획 승인 요청 공문 1부
2. 휴일 근무 주요 내용 1부
3. 감리원 근무 계획(주 52시간 준수)
4. 코로나19 확산방지를 위한 건설공사장 대응지침(3차 개정판).  끝.