문서번호	시설관리과-3318
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
유홍규	나동안	김근태	02/28 박기용
협 조

방죽증압장 감시제어반 외 1개소

제작 구매 설치 추진 계획

2022년 2월

강남수도사업소

(시설관리과)

방죽증압장 감시제어반 외 1개소

제작 구매 설치 추진 계획

방죽증압장 감시제어반과 일원배수지 전동밸브 제어반을 개량하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2022년 기전설비 유지관리 추진계획

○ 강남수도 시설관리과-1312(2022.1.24.)

Ⅱ		개량 시설물 현황

□ 방죽증압장 감시제어반

시설물 위치	설치년도	모터펌프현황	급수현황
*************	*****	********	************

□ 일원배수지 전동밸브 제어반

시설물 위치	설치년도	전동밸브현황	급수현황
***********	*****	**********	**************

□ 대상 시설물 사진

방죽증압장 감시제어반		일원배수지 전동밸브 제어반

Ⅲ		세부추진계획

□ 사업명 : 방죽증압장 감시제어반 외 1개소 제작구매설치

□ 사업개요

○ 방죽증압장 감시제어반, 일원배수지 전동밸브 제어반 제작구매설치,
PLC 프로그램 수정 1식

□ 사업기간 : 2022. 3. ~ 6.(4개월)

□ 추진일정

○ 2022. 3.   7. : 조달청 구매 규격 사전공개 요청(행정지원과)

○ 2022. 3. 14. : 우수업체 추천의뢰(한국계측제어공업협동조합)

○ 2022. 3. 17. : 조달계약 의뢰

○ 2022. 4. 18. : 도면승인 및 물품제작

○ 2022. 6. 1. ~ 30. : 현장설치 및 시운전, 준공

□ 증압장 감시제어반 개량 방법 : 부단수 작업

○ 민원발생을 방지하기 위하여 이동형 인버터 제어반 사용, 부단수 작업 시행

Ⅳ		계약방법

□ 계약방법 : 조달청계약(지명경쟁입찰)

○ 지명경쟁 사유

- 안정적인 급수 실시와 원활한 유지관리를 위하여 상수도 자동제어설비 및 운영프로그램 경험이 풍부한 업체 선정(한국계측제어공업협동조합추천 5개 업체)

○ 법령·예규 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법) 제1항 및 제4항 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약) 제10호 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제27조(지명입찰의 지명기준) 제2호 ‘가’목 규정.

□ 소요예산

○ 소요예산 : ********

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 시설비 및 부대비, 시설비(아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량)

Ⅴ		사업효과

□ 노후 감시제어반을 교체하여 시민급수의 안정성 확보.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.