문서번호	기전과-1786
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
송정호		김형집	02/28 김용제
협 조

고척2지하차도 진입차단시설 설치공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강서도로사업소

기 전 과

고척2지하차도 진입차단시설

설치공사 발주계획 보고

고척2지하차도에 진입차단시설을 설치하여 지하차도내 침수 및 화재시 지하차도로 진입하는 차량을 차단하여 2차 안전사고 발생을 방지하고자 함.

▢ 관련근거

○ 오금 및 고척2지하차도 진입차단시설 설치계획 보고

(기전과-3909호,2021.8.13.)

▢ 추진경위

○ 2021.06.04. : 지하차도 침수위험도 등급 재평가 결과통보(도로시설과)

○ 2021.09.∼11. : 실시설계용역 시행

○ 2021. 12. : 오금지하차도 진입차단시설 설치공사 계약체결

- 공사기간 : 2021.12.20.∼2022.05.31.

※예산사정으로 고척2지하차도 진입차단시설 공사는 ‘22년 시행

▢ 공사개요

○ 공사위치 및 규모 : 고척2지하차도 양방향 입구부 진입차단시설 설치

○ 총공사비 : 총384백만원

(구조물설치공사 199백만원, 전기공사 180백만원, 이전비 5백만원)

○ 공사기간 : 2022. 2.∼ 6.

○ 위치도 및 설치예시

설치 위치도	진입차단시설(설치예시)

▢ 예산과목

○ 도로시설관리, 기전시설물 관리, 지하차도 노후 배수시설 개량, 시설비

▢ 도급공사 발주

○ 발주방법 : 구조물설치공사와 전기공사로 분리하여 발주

구분	구조물설치공사	전기공사	비고
입찰 자격 (면허)	건설산업기본법에 의한 금속구조물·창호·온실공사업 또는 기계설비공사업 면허를 등록한 업체.	전기공사업법에 의한 전기공사업 면허를 보유한 업체

※ 전기공사업법 제11조 전기공사는 다른 업종의 공사와 분리발주하여야 함.

○ 입찰방법 : 제한경쟁(지역제한)

▢ 향후계획

○ 2022. 2. : 예산재배정 요청 및 공사 발주

○ 2022. 6. : 공사준공

붙임  공사별 산출내역서 각1부.  끝.