문서번호	설비부-2466
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김진영	김현기	02/28 김호성

『서울시네마테크 건립 통신공사』관급자재(전관방송설비)

계약취소 및 재구매 검토보고

2022. 02.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 통신공사」관급자재(전관방송설비)

계약취소 및 재구매 검토보고

건설사업관리단으로부터 제출된「서울시네마테크 건립 통신공사」관급자재(전관방송설비) 계약취소 및 재구매 요청에 대하여 검토 후 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 통신공사

□ 위    치 : 서울특별시 중구 마른내로 38

□ 공사기간 : 2020.01.31. ~ 2022.12.10.

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소근정

2		관련근거

□  다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 2021-18호, ’21.06.23.)

□  계약취소 및 재구매요청 검토(근정시네 제2022-111호, ’22.02.25.)

3		검토내용

□ 관급자재(전관방송설비) 계약현황 ***************

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
*********** **************	****************	*******	**********	*********
*********** **************	*******	****	*******	*********
*********** **************	*********	*********	*******	*********
*********** **************	**************	****	*********	*********

□ 관급자재(전관방송설비) 계약취소 계획

○ 관련근거 : 물품 다수공급자계약 특수조건 제26조 2항 및 4항

- 제26조 2항에 의거, 납품기한을 2회(회당 납품기한 연장기간은 규정상 납품기한 이내)에 한하여 연기할 수 있고,

- 같은조 4항에 의거, 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 추가 연기할 필요가 있는 경우 계약상대자와 협의하여 해당 납품요구를 취소하고 추후 납품을 희망하는 때에 새로운 납품요구를 지시할 수 있다.

○ 계약취소 사유

- 선행공정(건축) 준공기한이 연장됨에 따라 변경된공정계획에 의거 적기에 납품이 가능하도록 납품기한 연장이 필요하나, 물품 다수공급자계약 조건에 의거 납품기한 연장이 불가한 바, 당초 계약을 취소하고 재구매 계약을 체결하고자 함

○ 계약취소 내용(전관방송설비)

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
*********** **************	****************	*******	**********	*********
*********** **************	*******	****	*******	*********
*********** **************	*********	*********	*******	*********
*********** **************	**************	****	*********	*********

□ 관급자재(전관방송설비) 재구매 계획

○ 관급자재 재구매 의뢰(당초 취소 계약물량)

- 재구매 대상 : 납품기한 연기조치가 불가하여 취소 요청한 계약물량

- 재구매 방법 : ***************

- 납 품 기 한 : 2022.12.10.까지

□ 건설사업관리단 의견

○ 관급자재(전관방송설비) 계약취소 및 재구매에 대하여 검토한 결과, 관련 법규정에 의거하여 계약을 취소하고 재구매 계약을 체결함이 적정하다고 판단됨

4		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견이 타당하다고 판단되므로 계약부서로 관급자재(전관방송설비) 계약취소 및 재구매 계약체결을 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.