투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경 요청 및 공기연장 실정보고에 대한 보완요청 및 중간회시)

1.업무지시현장 : 강동구 자원순환센터 건립공사 서천건설(주), 강동구 자원순환센터 건

립공사 코오롱글로벌 주식회사, 강동구 자원순환센터 건립공사 코오롱

환경서비스주식회사, 강동구 자원순환센터 건립공사 주식회사 경호엔

지니어링종합건축사사무소, 강동구 자원순환센터 건립공사 주식회사

신한종합건축사사무소, 강동구 자원순환센터 건립공사 주식회사 동해

종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2022-03-01 12:03:34

3.지 시 내 용

가. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

나. 관련문서

1) 강자사 22-032호(2022.2.14.) 수정본(2022.2.22)

2) 강자사 22-038호(2022.2.23.)

다. 위 대호와 관련하여 '강동구 자원순환센터 건립공사'의 "실정보고(매립폐기물 처리에 따른 공기연장 요청) 검토보고"에 대하여 검토중 변경계약 합의각서 및 각 계약사별 동의서 각 1부와 공기연장 전/후 대비 예상공정표를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다

라. 아울러 "설계변경 요청(ES 1회 및 매립폐기물 처리비) 검토 보고" 및 "실정보고(매립폐기물 처리에 따른 공기연장 요청) 검토보고"에 대하여 설계변경 위원회 및 내부보고 등 소정의 절차를 거쳐 진행중에 있어 다소 지연될 수 있으니 그리아시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							차혁진			환경설비과장					03/02 김현기
협조자
시행			설비부-2556									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F															/			http://seoul.go.kr/
전화		02-3708-8617						/전송			02-3708-8659					/	chacine@seoul.go.kr												/	부분공개(7)