문서번호	도시재생과-1246
결재일자	2022.3.3.
공개여부	부분공개(5)

주무관	재생기획담당	도시재생과장	도시관리국장
김중혁	구필서	김영욱	전결 03/03 이창구
협 조

종암 북바위 골목길 재생사업 추진계획 보고

2022. 03.

도시관리국

(도시재생과)

종암 북바위 골목길 재생사업 추진계획 보고

종암7 재개발 해제구역 내 20년 이상 노후 주택과 저층주거지로 형성된 주거지역의 기반시설(도로 및 하수도), 담장정비 및 쉼터조성을 통해 쾌적하고 안전한 마을을 조성하고자 사업 추진 계획을 보고 드림
	ㅊ

Ⅰ		추 진 근 거

2022년 성북구 골목길 재생사업 추진계획(도시재생과-295호, ‘22.01.17)

Ⅱ		사 업 개 요

공 사 명: 종암 북바위 골목길 재생사업(토목‧건축 공사)

위    치: 성북구 종암로16길 일대

공사기간: 2022. 3. ~ 6.

공사내용

○ 토목공사

- 아스콘 및 미끄럼방지포장 A=7.5a

- 보도블록포장 A=2.9a

- 경계석포장(150×150) L=348m

- 빗물받이 및 맨홀뚜껑 교체 50EA

○ 건축공사

- 담장정비 13개소

- 상자텃밭 27개소 및 화분설치 41개소

- 파고라쉼터 및 벤치플랜트 1EA

확보예산: 529백만원(구비 90, 시비 439)

○ 188백만원(토목공사)

○ 126백만원(건축공사)

○  50백만원(디자인시설물 공사)

○ 100백만원(하수도정비, 치수과 시행)

○  36백만원(CCTV, 보안등 설치)

○  10백만원(전신주 이설)

○  19백만원(주차장 조성공사 기성금 지급)

예산과목

○ 도시재생과, 지역균형발전개발, 체계적인 도시재생사업 추진, 종암 북바위 골목길 재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비 – 40백만원(구비, 당해예산)

○ 도시재생과, 지역균형발전개발, 체계적인 도시재생사업 추진, 종암 북바위 골목길 재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비 - 440백만원(시비400, 구비 40, 명시이월)

○ 도시재생과, 지역균형발전개발, 체계적인 도시재생사업 추진, 종암 북바위 골목길 재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비 - 49백만원(시비 39, 구비 10, 사고이월)

Ⅲ		보 고 내 용

재생사업 구역내 토목(도로 및 하수도), 건축분야가 혼재되어 있고, 공사소요기간(건축 2개월 이내, 토목 3개월 이상)이 달라 신속하고 효율적인 사업시행 및 상반기 지방재정 조기집행 달성을 위하여 토목공사 및 건축공사 분리 발주

공사의 전문성 확보와 품질 확보를 위하여 하수도 정비는 치수과 협조

사업비 집행 세부계획

○ 토목공사

(단위: 원)

구 분	금 액	비 고
총 사 업 비	187,818,000
도 급 비	123,290,000
관 급 비	59,988,000
이전비(폐기물처리비)	4,540,000

○ 건축공사

(단위: 원)

구 분	금 액	비 고
총 사 업 비	125,800,000

Ⅳ		조 치 계 획

상기 보고 내용과 같이 토목공사 및 건축공사를 분리발주함으로써 신속하고 효율적인 정비를 통해 주민들에게 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하고자 함.

Ⅴ		향 후 계 획

2022. 3. ~ 4. : 건축공사 착공 및 준공

2022. 3. ~ 6. : 토목공사 착공 및 준공

붙임  토목 및 건축공사 설계내역서 각 1부.