문서번호	주거환경과-2118
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경과장
박윤수		서신석	03/04 이동일
협 조

조롱박마을 주민공동이용시설 사업비 재배정 계획

2022. 03. 03.

균형발전본부

(주거환경과)

조롱박마을 주민공동이용시설 사업비 재배정 계획

영등포구 조롱박마을 주민공동이용시설 사업비 재배정 요청(시설비, 감리비)에 따라 요청액 검토 후 관련내용을 보고드림

□ 주민공동이용시설 개요

○ 건    명: 영등포구 조롱박마을 주민공동이용시설 신축공사

○ 위    치: 대림1동 973-20일대

○ 공사기간: ’22. 1.~’22. 12.

○ 사 업 비: 830,736천원(시설비 810,128천원, 감리비 20,608천원)

○ 건축규모: 지상2층, 연면적199㎡(건축면적110㎡ 건폐율57.29% / 용적률 103.65%)

- 층별 운영계획 및 조감도 등

구 분	운용 계획	면 적(㎡)	비 고
지상 1층	주방(반찬류 판매 등), 대관사업	89
지상 2층	마을공방(소규모 물품 제작․판매 등)	110
옥상층	다락, 옥외 휴게공간	-

주변현황(연결 브릿지)	조감도

공동이용시설

마을도서관

□ 추진경위

○ ’20. 7. 9.: 市 주거환경관리자문단 회의(자문 결과: 신축)

○ ’21. 2. 4.: 건축물 간 연결브릿지 계획 결정

- 주민공동이용시설(市소유)+마을도서관(區소유)→건축협정

○ ’21.  4. ~  5. : 서울시 경관심의(조건부 의결)

○ ’21. 12. 29.: 주민공동이용시설 신축공사 시행

□ 사업비 재배정 검토내용

○예산현황

(단위 : 천원)

구 분			최초 요청액	기 배정액	요청액	총예산	비 고
합 계			905,794	800,000	26,028	826,028
시설비	소 계		895,832	800,000	10,128	810,128
	조롱박마을 주민공동이용시설 신축공사	21년 예산	895,832	800,000		800,000
		22년 예산	-	-	10,128	10,128	’21년도 미지급금
감리비	소 계		9,962	-	15,900	15,900	‘22년도 예산
	신축공사 감리용역		9,962	-	9,700	9,700	금액 감소
	해체감리용역		-	-	6,200	6,200	신규 추가

○ 재배정 요청사유

1) ’21년 보유예산 부족으로 미지급된 잔여 시설비(￦10,128천원) 요청

2) 최초예산 요청(영등포구 → 서울시) 시 해체공사 상주감리용역 대가 미반영

※ 감리용역비(￦15,900천원) 산출근거 : 붙임파일 참조

○ 검토의견

- 주민공동시설의 시공자 선정되었고 원활한 공사 추진을 위해   ’21년 예산부족으로 미지급된 시설비를 재배정하는 것이 타당함

- 해체공사장 현장중심 안전관리 강화대책〔(행정2부시장 방침 제127호)(지역건축안전센터-8009호(’21.7.5.)〕에 따라 예산계획 수립 시(’21.4.) 미반영 된 신규 해체공사에 대한 상주감리용역 감리비를 추가 재배정 하는 것이 타당함.

□ 행정사항

○ 요청금액(￦26,028천원)에 대한 e호조 처리

붙임 : 감리용역 설계서 각1부.  끝.