문서번호	토목부-3502
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	03/04 하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(지장물이설) 검토 보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(지장물이설) 검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사』지장물 이설, 복구 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 보차도교 실정보고 검토보고(지장물 이설 및 복구)-창동상계 제32-042호(‘22.02.24.)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

□ 규    모 : 보차도교신설 : 폭 32.0m, 연장 118.0m

□ 사업기간 : ‘21.04.19.∼’24.04.18. (1차 ‘21.04.19.∼’22.05.16.)

□ 도 급 비 : ************************

□ 시공사/건설관리사업단 : ******************************

Ⅲ		실정보고 검토

◆ 교대 및 교각 가시설 작업구간내 기존 시설물 이설 및 복구

⇒ 교각(P1-2) : 조명탑 1개소(임시조명 7개소, 복구 1개소)

⇒ 교대(A2) : 교통관리시스템 전기 및 광케이블(임시관로 L=240m, 복구 L=883m)

가로등 1개소(임시가로등 2개소, 복구 1개소)

○ 추진경위

협의일	주 요 내 용	비 고
‘21.11	· 지장물(가로등, 전기 및 광케이블) 이설 요청 → 토목부-22028(2021.11.29.)
‘21.12.	· 지장물 이설요청 회신 → 도로시설처-17492(2021.12.2.) - 1EA이설, 임시조명 2EA설치 / 원인자 부담 이설, 복구	가로등
‘21.12.	· 지장물 이설요청 회신 → 교통정보처-8984(2021.12.9.) - 임시선로 설치(L=240.0m) 및 복구(L=883.0m) / 원인자 부담 이설, 복구	광케이블
‘22. 01.	· 조명탑 이설 구두협의 → 임시조명 7개소설치 및 복구 / 원인자 부담 이설, 복구	조명탑

○ 위치도 및 현황사진

보 행 교

시점부

종

점

부

○ 공사비 및 수량 증.감 내역

- 당초 0천원 → 변경 95,131천원  증)95,131천원

(단위 : 천원)

공 종 명	규 격	금 액			비 고
		당 초	변 경	증·(-)감
전기 및 광케이블(교통관리시스템)	임시(L=240.0m) 및 복구(L=883.0m)	*	******	******
가로등	임시가로등 설치(2EA) 및 복구(1EA)	*	*****	*****
조명탑	임시조명 설치(7EA) 및 복구(1EA)	*	*****	*****
공 급 가 액		***	******
부 가 세		***	*****
총 공 사 비		***	******		제경비제외

공 종 명	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·(-)감
전기 및 광케이블(교통관리시스템)	임시(L=240.0m) 및 복구(L=883.0m)	식	-	1	1
가로등	임시가로등 설치(2EA) 및 복구(1EA)	식	-	1	1
조명탑	임시조명 설치(7EA) 및 복구(1EA)	식	-	1	1

○ 단가적용

-  신규비목 단가협의 (공사계약일반조건 제6절, 제7절)

· 협 의 일 : ‘22.02.16(수)

· 참 석 자 : 발주처 공사관리관 ***

시공사 현장대리인 ***

· 협의결과 : 협의율 적용【설계가의 93.002%(’21.12월 기준)】

- 협의내역

공 종 명	시 공 사	발 주 처	적 용
지장물이설 및 복구	계약상대자의 책임없는 사유로 설계가의 100% 제안	낙찰율 86.005% 제안	공사계약일반조건 제7절 1-나.에 의거 협의율 93.002%적용

Ⅳ		조 치 계 획

○ 건설사업관리단 실정보고 내용을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되며

교각(P1-2) 및 교대(A2) 지장물 간섭으로 인한 유관기관 협의결과에

따라 이설 및 복구하고 향후 설계변경시 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.