투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(물순환정책과장)
(경유)
제목	사업시기 조정에 대한 후속조치 알림(응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사)

1. 물순환정책과-634호(2022. 1. 11.)와 관련입니다.

2. 우리 시(본부)에서 추진중인  『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』에 대하여 공사구간에 접한 노후 석축과 유수지 인근 노후 건축물에 대한 위험요인 해소를 위해 주변지역 재건축 시기와 연계하여 시행하고자 공사시기를 ’24년 상반기 이후로 조정하여 시행토록 후속조치를 이행하였습니다.

3. 아울러, 사업시기 조정에 대한 해당 시공자 의견을 ‘붙임’과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  시공자 의견 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정동훈		환경시설과장	代이성우		방재시설부장	03/04 이동훈
협조자
시행	방재시설부-2424	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩(14층, 방재시설부)	/
전화	02-3708-8782	/전송	02-3708-8756	/	vip138@seoul.go.kr	/	부분공개(5)