문서번호	간호1과-1832
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
팀장	간호1과장	간호부장		서북병원장
강세란	천선옥	정남숙		03/04 박찬병
협 조
	진료부장		심재천
	원무과장		代허근행
	간호2과장		민선정

-스프링클러 공사 관련- 시술공급실 이전 및 운영 계획

2022. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

-스프링클러 공사 관련-

시술공급실 이전 및 운영 계획

스크링클러 시설 공사 대상인 시술공급실의 원활한 공사 진행을 위해 시술공급실을 이전하여 물품 공급 및 운영에 최선을 다하고자 함.

1		추 진 근 거

서북병원 소방스프링클러 설치 추진계획(원무과-10090호, ’21.8.13.)

제8차 스프링클러 T/F 집행회의: 시술공급실 공사일정(안) 안내

2		추 진 개 요

일 정

❍ 1차 이동: (시술공급실 ⇒ 16병동)  2022.04.01.(금)

❍ 2차 이동: (16병동 ⇒ 시술공급실)  2022.07.06.(수)

※ 시술공급실 스프링클러 설치 공사기간 예정: 4 ~ 6월

대 상: 시술공급실(인력, 물품 등)

방 법: 스크링클러 공사일정에 맞춰 시술공급실 ↔ 16병동 이동

※ 공사기간 멸균기 주 1회 가동(제외기간: 천장 철거 2주, 천장 복구 1주)

인 력: *************************

물 품: 의료장비, 비품, 사무기기, 전산장비, 소모품, 린넨 등

3		추 진 계 획

일 정   (※ 세부일정은 공사상황에 따라 변동 가능)

날 짜	내 용
3.24.(목) ~ 3.30.(수)	◦ 전부서 3~4주분 사용분량 물품 및 린넨류 배부 ◦ 16병동 청소
4.1.(금) ~ 4.6.(수)	◦ 공급실 ⇒ 16병동 이동 - 병동 배부 물품(소모품류) 등 2개월 분량 이동 - 린넨류 2개월 분량 이동 - 사무기기, 전산장비, 의료기기, 물품보관용 경량렉 등 이동
4.7.(목)	◦ 공급실 업무 재개(위치: 16병동)
4.7.(목) ~ 7.4.(월)	◦ 스프링클러 설치 공사기간 공급실 업무 - 주 1회 멸균기 가동(제외기간: 천장철거 2주, 복구 1주) ※ 필요 시 배부 가능 - (기존 동일) 매주 목요일 물품 배부 - (평일 매일 오전) 린넨류 각 병동으로 배부 - (매일) 세탁 완료된 근무복 및 수건 배부
6.30.(목) ~ 7.4.(월)	◦ 전부서 2주분 사용분량 물품 및 린넨류 배부
7.1.(금) ~ 7.4.(월)	◦ 시술공급실 청소
7.6.(수) ~ 7.8.(금)	◦ 16병동 ⇒ 공급실 이동 - 물품 이동 및 업무 재개 준비
7.11.(월)	◦ 시술공급실 업무 재개(위치: 본관 2층)

이동 규모

❍ 인력 현황: 총 6명******************

계	간 호 사				공공근로
	소계	팀장	6급	8급
*	*	*	*	*	*

❍ 물품 현황

- 의료장비 및 비품: 환자감시장치, 응급카트, 휠체어 등 *******

- 사무기기: 옷장, 캐비넷, 서랍장, 의자 ******

- 전산장비: 컴퓨터(모니터포함) **, 프린터 **

- 소모품 및 린넨류

․ 소모품: 주사기, 드레싱 용품, 손소독제 등 ****

․ 린넨류: 환의, 이불, 침대시트, 베개커버 등 **

□ 16병동 공간 구성

구 분	휴게실	처치실	간호사실	병실
용 도	린넨실	공급실	사무실	물품보관창고

4		행정사항

전 부서

❍ 공사일정(4 ~ 6월)에 따라 공급실 물품 미리 최대 신청, 자체보관 사용

- 3. 24.(목) ~ 3.30.(수): 3~4주분 사용분량 물품 신청

(공급실 ⇒ 16병동 이동 전 물품 신청)

- 6. 30.(목) ~ 7.04.(월): 2주분 사용분량 물품 신청

(16병동 ⇒ 공급실 이동 전 물품 신청)

원무과

❍ 서무팀: 시술공급실 ⇆ 16병동 물품 이동 시 인력 지원

❍ 시설팀: 건축․전기․기계 등 시설관리 및 청소 등 환경관리.  끝.