문서번호	동남권사업과-147
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		공공사업팀장		동남권사업과장
박수연		소영수		01/06 임춘근
협 조
	주무관				안현우
	주무관				오지선

「잠실종합운동장 주경기장 리모델링사업」

환경영향평가용역 계약변경 검토 보고

2022.  1.

균형발전본부

(동남권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「잠실종합운동장 주경기장 리모델링사업」

환경영향평가용역 계약 변경 검토 보고

「잠실운동장 주경기장 리모델링 환경영향평가용역」관련 과업내용 변경에 따른 계약금액 변경 및 용역기간 연장하고자 함.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 :「잠실운동장 주경기장 리모델링」환경영향평가 용역

○ 용역업체 : ㈜수성엔지니어링 외 2개사

○ 용 역 비 : 232,188천원 (전액 현대차GBC 공공기여)

○ 용역기간 : 착수일로부터 13개월 (`20.12.16 ~ `22.01.09)

○ 과업내용 : 전략환경영향평가 재협의 + 소규모 환경영향평가

Ⅱ		추진경위

○ ‘17.05~‘18.08.	전략환경영향평가 협의

- 탄천양안 및 한강변정비, 올림픽 주경기장 리모델링 타당성조사 및 기본계획

○ ‘20. 12.16   환경영향평가용역 착수

○ ‘21. 10.14   전략환평 변경협의서 접수

○ ‘21. 10.19    전략환평 변경협의서 작성 및 한강유역환경청 사전 협의

○ ‘21. 12.03   환경영향평가용역 과업 변경 검토보고

************************************************

○ ‘21. 12.06   환경영향평가용역 과업 변경 지시(市 ⇒ 용역업체)

○ ‘21. 12       환경영향평가협의회 구성 및 심의 요청

Ⅲ		계약변경검토

□ 변경사유

*****************************************

***************

****************************************************

**********************************************

************************************************

□ 변경내용

구 분	변경전	변경후	비고
계약금액	금232,188,000원	*************	*************
과업내용	- 전략환경평가 변경협의서 작성 및 협의 - 소규모영향평가 협의	*************** ************** ******************* ************* *****************
계약기간	`20.12.16 ~ `22.1.9	*******************	*******

<계약금액 세부 변경사항>

*********************************************

*********************************************************

************************************************************

***********************************************

************************************************

****************************************************

****************************************************

***********************

Ⅳ		향후계획

○ ‘22. 1.   변경계약 의뢰(→재무과)

****************

붙임 1. 과업변경 검토 보고서 1부.

2. 변경 과업지시서 1부.

3. 변경 설계내역서 1부.

4. 합의각서 및 예정공정표 1부  끝