문서번호	도심권사업과-1998
결재일자	2022. 3. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	다시세운관리팀장	도심권사업과장		균형발전기획관
조한근	최현	이상면		03/07 김승원
협 조

도시계획시설(도로 및 녹지)사업 실시계획 변경인가 고시

2022. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시계획시설(도로 및 녹지)사업 실시계획 변경인가 고시

세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)의 준공기한 연장에 따라 도시계획시설(도로 및 녹지)사업 실시계획 변경인가를 하고자 함.

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)

❍ 공사기간 : 2018. 9. 10. ~ 2022. 3. 31.

❍ 공사규모 : 을지로~삼풍상가/PJ호텔~인현/진양상가~퇴계로

- 데크신설·기존데크 보수, 공중보행교(2개소), 지하연결통로(2개소), 큐브셀(19개) 등

Ⅱ		추진 경위

❍ ’14.03.27 : 세운재정비촉진계획 변경 결정 (서고시 제2014-119호)

❍ ’17.07.20 : 세운2단계구간 기본 및 실시설계 착수(’17.7.20.~’19.2.28.)

❍ ’18.06.07 : 세운재정비촉진계획(기반시설계획) 변경 결정(서고시 제2018-177호)

- 세운상가군 재생사업 2단계구간 보행데크 도시계획시설 결정

❍ ’18.09.10 : 공사착수(공사계약 ’18.08.23.)

❍ ’18.11.22 : 도시계획시설 경미한 변경 및 실시계획인가(서고시 제2018-372호)

- 세운상가군 재생사업 2단계구간 보행데크 도시계획시설사업 시행

❍ ’20.01.09 : 도시계획시설사업 실시계획 변경인가 (서고시 제2020-23호)

**********************************

❍ ’21.06.03 : 도시계획시설사업 실시계획 변경인가 (서고시 제2021-249호)

******************************

❍ ’21.12.17 : 도시계획시설사업 경미한변경 및 실시계획 변경인가(서고시 제2021-702호)

- 지하연결통로 중복결정 면적정정 및 준공예정일 변경(’21.12.31.까지)

Ⅲ		실시계획 변경

□ 실시계획 변경

************************

****************************************

****************************************

****************

*****************************

*********************************************************

□ 검토 의견

*************************************************************************************

*******************************************************

********************************************************************************************

Ⅳ		향후계획

******************************************************

**********************************

********************************

붙임 : 1. 고시문(안) 1부.

2. 관련 공문(도기본 설비부) 1부.  끝.