문서번호	서울로관리사무소-372
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	서울로관리사무소장	중부공원녹지사업소장
심선아	이무림	이종일	03/08 김인숙
협 조

「서울로 안전난간 재정비 사업」관련

전문가 자문 및 제1차 TF회의 결과보고

2022. 3.

중부공원녹지사업소

(서울로관리사무소)

「서울로 안전난간 재정비 사업」관련

전문가 자문 및 제1차 TF회의 결과보고

「서울로 안전난간 재정비 사업」관련 전문가 자문 및 제1차 TF회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : 2022. 3. 4.(금) 10:00 ~ 12:30

○ 장    소 : 서울로관리사무소 회의실 2층

○ 참 석 자 : 총 10명

- TF팀(7)

▸ 내부 : 소장, 김경원(시설과) 등 관계자

▸ 건설사업관리자(예정)

→ 제일엔지니어링 : 김정철 단장, 유춘명 부장

- 전문가(3)

▸ 서울시 교통영향평가 심의위원 및 이성모 서울대 교수

▸ 제일엔지니어링 부사장 김희욱 구조기술사

▸ 허믹(주) 김효근 이사(화분균열 관련 자문)

○ 주요안건

- 서울로 안전난간 재정비 TF팀 운영 방향

- 난간 디자인 구조 안전성 및 사업추진 논의

- 균열 트리팟 보수 및 경관 보완방안에 대한 자문

□ 회의결과

【안전난간 핸드레일 설치 검토】

○ 설계 시 2m 간격 지주만으로 풍압력 등 수평하중 저항이 가능하여 미적용.

○ 시설물의 안전성 확보는 구조적인 것뿐만 아니라 심리적, 시각적 안전성 및 기대 경우 등을 고려하여 핸드레일 설치가 필요

- 난간을 넘어가는 발디딤 역할을 하지 못하도록 기존의 90cm 높이보다 낮은 60cm로 하향(인근 트리팟보다 낮은 높이)하여 설치 검토

- 핸드레일 설치 시 지주, 기존 앵커의 인발력 부족에 따라 추가 철근보강 불필요 의견

⇨ 설계사(글로벌 엔지니어링)에 요청 구조적 안전성 등을 반영·가능여부를 검토하고자 함

【교통처리계획】

○ 도로점용기간 20일 이하의 공사 규모로 경찰서 및 중구청 협의로 가능하나 사업지연이 없도록 철저한 관리필요

- 도로 1개 차로이상을 20일 이상 점용사용시 서울시도로점용공사장교통소통대책자문회의 구성·운영위원회 심의필요

(서울시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한조례 제3조 등, 서울시 교통운영과)

- 서울로 안전난간 정비사업은 동일 도로 20일 이상 점용사례에 미해당

【처리흐름도】

교통소통대책 규제심의	⇨	교통소통대책 심의	⇨	도로점용허가
(남대문 경찰서)		(중구 교통행정과)		(중구 가로환경과)

【철도보호지구 행위신고】

○ 철도보호지구 행위신고, 철도안전 교육이수 등의 철도공단과 협의절차로 인해 공정 지연이 발생하지 않도록 협의절차 추진필요

- 교통소통대책 심의 및 퇴계로 주변 비계 시공 중 병행 협의 추진

【비계설치 여부검토】※ 설계 미반영구간(청파로 구간) 포함

○ 산업안전보건법의 작업 근로자의 추락 및 낙하물 방지 등 위험 방지를 위해 기존 비계설치구간내 비계설치 및 미설치 구간도 비계설치 필요

【안전난간 구간 연장】※ 서울로테라스 건축물 ~ 한양도성 방향 약 100m

○ 거리 노숙인 등이 없는 서울역 반대구역이고 상대적으로 지면과의 거리가 낮아 자살시도 시 다칠 가능성만 있는 구간으로 추가 안전난간 설치는 불필요

【기타⦁설계도면 보완 등】

○ 안전난간 핸드레일 수평 신축이음 처리 시공을 위한 상세도 작성

○ 출입구, 타 연결통로 접속 연결부의 단구간 강화접합유리 처리 상세도 작성

【균열 트리팟 보수보강】

○ 구조적으로 파손 우려는 없다고 보며, 외부 미관 불량으로 인한 보수가 요구

다만, 그림 등을 그리는 것은 컬리티 있는 그림이 나올 수 없기 때문에 바람직하지 않음

○ 균열부분 접착재 삽입 후 콘크리트면 색상 일체화 도포 방식의 공법 검토 추진 바람직

○ 시범 시공후 모니터링하여 확대방안 등 검토 추진

□ 행정사항

○ 자문회의 참석수당 지급 : 750,000원

- 회의 참석수당

⦁ 200,000원 × 3인 = 600,000원

⦁ 150,000원 × 1인 = 150,000원

※ 회의참석수당: 150천원/2시간 이상 시 초과 50천원

화분 정비방안 자문 홍익대 유진형 교수은 22.2.17일자문 완료(1시간)

- 예산과목 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 운영, 서울로 7017 운영관리, 일반운영비, 사무관리비

붙임 1. 회의자료 각 1부.

2. 참석자 서명부 1부.  끝.