문서번호	급수운영과-3538
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
오규형	서규석	고신석	03/08 박병성
협 조
	행정관리팀장		이영기
	수질팀장		최성호
	시설운영팀장		김선호
	주무관		김태형
	주무관		최정현

깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 안정적으로 공급하기 위한

소블록(면단위) 배수관 세척사업 추진계획

2022. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

소블록 (면단위) 배수관 세척사업 추진계획

고도정수 처리된 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 안정적으로 공급하기 위한 소블록(면단위) 배수관 세척사업 추진계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 소블록(면단위) 배수관 세척사업 추진계획【급수운영과-1745호(’22.3.4.)】

Ⅰ		추진배경

□ 고도정수처리된 깨끗한 아리수를 가정까지 공급하기 위해 수도관 내부에 부착된 물 때(슬라임 등) 제거를 위한 세척 시행

※ 물흐름 방향 및 유속 변동 시 수도관 내부 탁수 발생 우려

□ 기존 물세척 및 공기주입장치를 활용한 세척 병행 시행

Ⅱ		세척사업 개요

□ 사업대상 : 소블록 303개(전체 소블록)

□ 연차별 추진계획(5년 주기 시행)

구 분	계	2021	2022	2023	2024	2025	비고
소블록(개소)	303	60	65	60	61	57
사업비(백만원)	2,385	416	709	420	420	420
기간제 노동자(명)	48	8	16	8	8	8

□ ’21년 배수관 소블록 물세척 추진실적                       단위 : 개소

소블록 세척	공기주입 세척	취약관로 세척	비고
68	31	26

Ⅲ		추진방법

□ 기간제노동자를 채용하여 물세척(일반물세척, 공기주입 물세척) 추진

□ 세척 전․후 수질검사를 통해 효과분석

○ 측정항목 : 퇴수시간, 퇴수량, 수질검사

○ 세척 전․후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소 등

○ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전․후 수질검사 및 결과분석

Ⅳ		’22년 추진계획

배수관 물세척(기간제노동자 활용)

□ 사업기간 : ’22. 4. 1. ~ 11. 30.(8개월)

□ 사업목표 : 소블록 65개소(사업비 449백만원)

○ 구   별                                                  (단위 : 개소)

구 분	계	관악구	금천구	동작구	영등포구
소블록	65	25	7	14	19

○ 소블록별

구 분	소계	소 블 록 현 황
	65
관악구	25	낙성대01-01, 낙성대01-02, 낙성대01-12, 낙성대01-13, 낙성대02-02, 낙성대02-07, 낙성대02-09, 낙성대02-10, 낙성대02-11, 낙성대02-14, 낙성대02-19, 낙성대가01-04, 낙성대가01-09, 낙성대가01-27, 낙성대가02-03, 낙성대가02-18, 낙성대가03-10, 낙성대가04-07, 낙성대가04-11, 낙성대가04-13, 낙성대가04-14, 낙성대가04-15, 낙성대가05-01, 낙성대가05-09, 독산01-16
금천구	7	금천01-01, 금천01-02, 금천01-09, 금천01-10, 금천02-03, 금천02-15, 금천03-02
동작구	14	대방05-08, 방배01-02, 방배01-08, 방배02-05, 상도01-05, 상도01-14, 상도01-15, 상도02-04, 상도02-09, 상도03-08, 상도03-09, 상도03-11, 상도04-01, 상도04-09,
영등포구	19	대방01-02, 대방02-02, 대방02-07, 대방02-11, 대방02-13, 대방02-16, 대방02-20, 대방02-22, 대방02-26, 대방02-31, 대방03-01, 대방03-09, 대방03-12, 대방03-13, 대방03-15,대방03-19, 대방03-22, 대방03-34, 대방03-40

○ 월   별

월 별	계	4	5	6	7	8	9	10	11
블록수	65	8	9	8	8	8	8	8	8

□ 추진방법

○ 기간제노동자 총 16명(반장요원 2명 포함) 선발

- 기간제노동자 중 세척작업과 기간제노동자를 통솔할 반장요원 2명(급수운영과, 시설관리과)을

선정하여 운영

○ 구별 세척일정 : 4~11월(관악구, 금천구), 4~11월(동작구, 영등포구)

- 당일 세척(물세척, 취약관로)실시 결과 확인 후 복명서 작성

○ 소블록 면단위 배수관 세척을 통해 관 내면에 침적된 물 때)슬라임)를 제거하여 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급

※ 퇴수밸브, 소화전 활용

물세척 개념도

물세척

취약관로

□ 사업목표 : 28개 구간                                  (단위 : 개소)

구 분		계	관악구	금천구	동작구	영등포구
취약구간	개 소	28	9	5	10	4
	연장(m)	2,716	795	495	870	556

□ 추진방법

○ 기간제 노동자를 활용하여 취약구간(관말 정체구간) 물세척 시행

○ 선정된 취약구간에 대하여 세척주기별 반복 세척(20~50일 주기)

- 세척주기 산정 : 50일(’21년도 세척주기를 반영하여 구간별 세척)

☞ 새로운 관말 정체구간 발생시 5단계(20, 30, 40, 50, 60일 등) 시범세척을

통해 주기 산정

○ 선정기준 : 관말 정체지역, 잔류염소 미달지역

○ 세척방법 : 퇴수시설을 이용하여 관말 정체구간 끝단에서 단방향 세척

관말 취약구간

관말 정체구간 등 취약구간 물세척

공기주입장치 활용 세척 시행

□ 공법개요

○『압축공기 + 물』로 관 내부를 세척하는 공기주입 세척사업

- 추진목표 : 60개 배수관(60구간)

공기주입 물세척 개념도

공기방울

압축공기

수돗물

제수밸브(잠금)

소화전(퇴수)

제수밸브 조절

(세척수 공급)

H

공기주입구

(새들설치)

공기주입장치

○ 대상구산 선정 : 지역 담당별 현장 조사 후 상반기 선정 예정

- 대상구간 선정 시 검토사항

․공급관로 양단에 제수밸브, 퇴수밸브 등 시설물이 설치된 곳

․세척구간에 분기된 수요가가 없거나 적은 곳

․공기주입구(새들분수전 등) 설치가 용이한 곳(공기밸브실 등 필요)

․세척중 발생되는 세척수의 처리가 용이한 곳(하수도 변실 인근 등)

- 공기주입 세척시 인근 유사한 소블록내 물세척 구간과 세척효과 비교 검토

Ⅴ		기간제노동자 채용방안

□ 기간제노동자 채용 개요

○ 채용인원 : 16명

○ 사업기간 : ’22. 4. 1. ~ 11. 30.(예산한도내 또는 업무완료시까지 한시적 채용)

○ 주요업무 : 배수관 물세척 업무수행

- 세척시행전 급수구역내 시민가정 단수 홍보

- 세척기간중 교통통제 및 세척후 주변 정리

- 세척전․후 수질검사 시행, 결과 비교 등

○ 근무조건 : 월~금요일까지 일 8시간(09:00 ~ 18:00)

□ 채용방법

○ ’22년도 물세척 기간제 노동자 채용계획에 의거 채용

Ⅵ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

○ 행정지원과

- 수질검사장비(탁도, 잔류염소계) 대여 및 수질검사 교육 : 수질팀

- 기간제노동자 출퇴근 확인을 위한 지문인식기 등록 : 행정관리팀

○ 급수운영과, 시설관리과

- 해당 소블록에 대한 물세척 위치 확인 및 도면 제출

- 당일 작업(물세척, 취약관로 세척) 실시 결과 확인 후 복명(과별 총괄담당 협조)

○ 본부 실적보고(배수과)

- 매월 10일까지 소블록 및 취약관로 물세척 실적 보고

□ 향후계획

○ 기간제노동자 채용계획 수립 및 채용	’22. 2. ~ 3.

- 기간제 노동자 채용 공고 : ’22. 2. 21.(월) ~ 3. 4.(금)

- 채용 참여신청서 접수 : ’22. 3. 8.(화) ~ 3.11.(금)

- 1차 합격자 발표 : ’22. 3. 18.(금)

- 1차 채용심사에서 선발된 인원 2차 공개 추첨(전 사업소 공통) : ’22. 3. 23.(수) 10:00

○ 소블록 배수관 물세척사업 추진	’22. 4. ~ 11.

○ 사업시행 후 효과분석	’22. 12.

붙임 : 연차별 소블록 물세척 추진계획 1부.  끝.