문서번호	설비부-2961
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		代임현철	03/08 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』

6차수 공사 발주 검토 보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』

6차수 공사 발주 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 6차수 공사 발주 요청건에 대하여 검토 하고 보고 드림.

1		공사개요

*********************************************

**********************************************************

************************************************************

***********************************************

**************************************

***************************************

**************************************

2		관련근거

□ 전기공사(6차수) 계약요청[율곡감 제2022-82('22.03.04.)]

3		검토내용

□ 계약현황                                               (단위 : 천원)

구 분	총 차	계약차수
		1차	2차	3차	4차	5차	6차
계약금액	1,427,600	224,862	42,669	39,886	572,354	443,454	104,374

□ 계약기간

구 분	계약년월일	착공년월일	준공(예정)년월일	비고
총 차	2014. 05. 09.	2016. 12. 15.	2022. 07. 31.
1 차	2014. 05. 09.	2016. 12. 15.	2015. 12. 09.
2 차	2016. 04. 07.	2016. 04. 07.	2016. 12. 12.
3 차	2017. 12. 18.	2017. 12. 18.	2018. 12. 05.
4 차	2019. 01. 22.	2019. 01. 23.	2020. 12. 10.
5 차	2021. 01. 11.	2021. 01. 15.	2022. 05. 31.
6 차	2022. 03.	2022. 03.	2022. 07. 31.

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 선행공종(토목)의 터널 상부 보행로 공정에 따라 전기공사 6차수 발주가 필요하고, 터널 시설물 인수·인계 및 점검사항 조치를 위하여 5차수 공사와 병행 시행하고자 함.

○ 시공사에서 제출한 6차수 발주계획서를 검토한 결과 관련 규정, 내역, 현장 여건과 적합하게 반영됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리단의 보고사항을 검토한 결과, 설계서 내용이 적정하다고 판단되어 계약부서(총무부)에 6차수 공사 계약 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.