문서번호	도시철도설비부-2137
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
김기범	구봉서	03/08 김중영

「서울도시철도 9호선 4단계 연장사업

건설공사 신호분야 기본 및 실시설계 용역」

수의계약 추진 계획

2022. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 4단계 신호분야 기본 및 실시설계 용역 수의계약 추진 계획

「서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 신호분야 기본 및 실시설계 용역」이 수차례 유찰되어 수의계약을 추진하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

○ 지방계약법 시행령 제26조(재공고입찰과 수의계약) 제1항

○ 지방계약법 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 제1항

○ 도시철도계획부-5695(2021. 7. 14.)「도시철도 9호선 4단계 연장사업 관련 업무협조 요청」

Ⅱ		추진 배경

○ 2021년 하반기, 공개경쟁입찰 방식으로 공고하였으나 단독 참가로 인한 유찰

- 2021.  7. 22.  기술용역타당성심사

- 2021.  8. 24.  건설기술심의

- 2021.  8. 30.  사전규격 공개

- 2021.  9. 10.  계약 의뢰

- 2021.10. 11.  입찰 공고 등록

- 2021.10. 22.  유찰 - 단독 참가(*****)

○ 참여 자격 변경(참여기술자 3명→2명) 후, 공개경쟁입찰 방식으로 2회 공고하였으나 2회 모두 단독 참가로 인한 유찰

- 2022.  1.   6.  사전규격 공개

- 2022.  1. 17.  계약 의뢰

- 2022.  1. 24.  입찰 공고 등록

- 2022.  2. 11.  유찰 - 단독 참가(*****)

- 2022.  2. 17.  재공고 등록

- 2022.  2. 25.  유찰 - 단독 참가(*****)

○ 도시철도사업계획승인신청에 앞서 철도안전진단을 시행하기 위한 기본설계 성과물이 필요

- 2022. 3.  전력, 통신분야 기본설계 완료 예정

- 2022. 6.  사업계획승인신청 예정

<교통안전진단지침(국토교통부고시 제34호, 2018. 1. 18.)>

제2장

1.4.1 설계단계 철도안전진단

가. … 도시철도의 경우 기본설계로 진단 가능 …

나. … 턴키(Turnkey) 사업의 경우 노반, 건축, 궤도, 전기, 신호, 통신분야에 대하여 진단 시행

Ⅲ		추진 계획

○ 용역명칭: 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 신호분야 기본 및 실시설계 용역

○ 용역위치: 9호선 중앙보훈병원역~고덕강일1지구

○ 용역규모: 9호선 연장선 4.123km, 역 4개소(939역 ~ 942역)

○ 용역기간: 착수일로부터 33개월

******************************************

○ 계약방법: 1인 견적 수의계약

<수의계약 근거>

○ 지방계약법 시행령 제26조(재공고입찰과 수의계약) 제1항

- 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

○ 지방계약법 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) 제1항 (제1호)

- 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.(제26조제1항에 따른 계약의 경우)

○ 계약대상: ***************

- ******************************************

○ 예산과목

- 도시철도건설사업비특별회계, 도시철도건설사업, 도시철도9호선4단계건설, 시설및부대비, 시설비

Ⅳ		향후 일정

○ 2022. 3.  수의계약 의뢰(도시철도설비부→총무부)

○ 2022. 4.  기본설계 완료

붙임  과업내용서 1부.

설계내역서(총차) 1부.

설계내역서(1차) 1부.  끝.