문서번호	도시철도설비부-2169
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박상규		장석춘	03/10 김중영
협 조
	송변전과장			전계목
	시설전기과장			백성현
	차량과장			배광희
	신호과장			구봉서
	설비공사과장			이광주
	정보통신과장			김이곤

신림선 경전철 민간투자사업

설비분야 예비준공검사 결과 보고

2022. 3. 10.(목)

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

신림선 경전철 민간투자사업

설비분야 예비준공검사 결과 보고

신림선 경전철 민간투자사업 준공에 앞서 예비준공검사를

실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 실시협약 제40조(예비준공검사 등)

- 주무관청은 접수 후 2개월 이내 예비준공검사를 시행하고 결과 통보

□ 대상시설

❍ 사업구간 : 샛강역(9)~대방역(국철)~보라매역(7)~신림역(2)~서울대 앞

❍ 규    모 : 연장 7.8㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

❍ 공사기간 : '17. 2. ~ '22. 5. (준공예정일 '22.5.26.)

❍ 총투자비 : 8,328억원

❍ 사업시행자 : 남서울경전철(주)

구 분	공 구 별 (토목․건축․전기․기계․검수․궤도)			건설사업단 (신호․통신, 차량)
	1공구	2공구	3공구
연장	2.286㎞	2.785㎞	2.689㎞	7.760㎞
구조물	정거장4개소, 환기구 1개소,터널2.041㎞	정거장 4개소, 환기구 3개소, 터널2.069㎞, 차량기지	정거장 3개소, 환기구 1개소, 터널2.404㎞	신호/통신
공사비	1,316억	1,841억	885억	652억
감리사	동산엔지니어링(주),(주)설화엔지니어링, 신우이엔지(주),(주)예향엔지니어링,(주)무림기술단			신우이엔지, 예향엔지니어링
시 공 사	두산건설	DL이앤씨	한화건설	DL이앤씨

□ 예비준공검사 실시

❍ 기    간 : 정거장 – ’22. 2. 15.~’22. 2. 17., 본선터널 - ’22. 2. 24.

❍ 참여인원 : 총 38명(검사자 24명, 입회자 14명)

(단위 : 명)

분 야	계	검 사 자			입 회 자			비 고
		기술지원감리	외부 전문가	주무 관청	운영사	도시 철도과	기타
시설전기(소방)	5	1	1	1	1	1	0
기계(소방)	8	1	2	1	1	1	2
전차선	4	1	1	1	1	0	0
송변전	4	1	1	1	1	0	0
차량	3	0	0	2	1	0	0
검수	5	1	1	1	1	0	1
신호	4	1	1	1	1	0	0
통신	5	1	1	1	1	0	1

□ 검사결과

❍ 지적사항 총괄(총 443건)

(단위 : 건)

구 분	계	토목	건축	전기/소방	기계/소방	전차선	신호	통신	송변전	차량/검수
지적사항	443	40	88	67	208	4	10	13	4	9

※ 지적사항 내용 : 별첨1 참조

□ 지적사항 조치 계획

❍ 분야별 지적사항에 대하여 사업시행자에게 보완 요구

❍ 책임감리단은 지적사항에 대하여 보완 완료 후 준공검사 실시

□ 행정사항

❍ 예비준공검사 결과는 도시철도사업부에 통보

❍ 사업시행자 및 설비분야 책임감리단에 신속한 조치 요청 통보

❍ 외부전문가 참여 수당 지급

- 외부전문가 참여 일자

(단위 : 명)

분야별	계	참 여 일 자					비 고
		2. 15.	2. 16.	2. 17.	2. 24.
시설전기(소방)	1		1
기계(소방)	4	1	1	1	1
전차선	1				1
송변전	2	1			1
차량.검수	1		1
신호	2	1			1
통신	2	1			1

- 소요예산 : 13명 × 220,000원/일 = 2,860,000원

- 예산과목 : 도기반시설본부, 신교통수단 도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설(민자), 시설비 및 부대비, 시설부대비

- 지급방법 : 총무과에 소요예산 배정받아 원천징수분 제외하고 외부전문가 개인통장에 입금

붙임  1. 신림선 예비준공검사 지적사항 총괄표 1부.

2. 신림선 예비준공검사 결과(분야별) 각 1부(별첨).

3. 신림선 예비준공검사 외부전문가 참석자 서명서 각 1부(별첨).  끝.