투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(자전거정책과장)
(경유)
제목	「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」 설계도서 검토에 따른 주관부서 조치요청

1. 「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」추진과 관련하여 설계도서 검토결과 설계누락 및 보완 사항이 다수 발생하여 현 설계대로 공사를 진행할 경우 하자발생 및 목적물 완성이 어려울 것으로 판단되는 실정입니다.

2. 따라서, 우리 본부에서 검토한 사항 및 서울시설공단 측의 설계반영(협의)요청 사항을 보내드리오니 내실있는 사업추진을 위하여 사업주관부서의 면밀한 검토 및 조치를 요청합니다.

○ 설계 검토결과

- 설계누락 및 보완사항 발생으로 추가 필요예산(증 270,172천원) 발생

- 자전거도로 신설구간 원안설계 시공시 하자 발생 우려

- 서울시설공단 설계반영 요청사항 발생

※ 서울시설공단 요청사항 소요예산 산출 중으로 별도 통보예정

○ 요청사항

- 설계보완, 추가소요예산 반영

- 예산 미반영시 사업추진방향 변경 등 결정요청

붙임 1) 설계도서 검토사항(본부) 1부.

2) 설계도서 검토의견 공문 및 의견서(서울시설공단) 각 1부.

3) 공사 관련 사전 협의 요청(서울시설공단) 1부.

4) 실무자 회의내용 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이승훈		터널건설과장	장종환		토목부장	03/11 代김태중
협조자
시행	토목부-3898	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개