문서번호	건축부-3791
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
손남기		정채문	03/11 신명승
협조

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 계약변경 검토보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(건  축  부)

-시립마포 실버케어센터 건립공사-

건설사업관리용역 계약변경 검토보고

「시립마포 실버케어센터 건립공사」관련, 건설사업관리용역 계약변경(용역기간 연장) 요청이 있어 검토 후 보고드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 (창업허브단지 조경공사 포함) 건설사업관리(감독권한대행)(장기3차)

*******************************************************************

*******************************************************

□ 용 역 자 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소(대표:박재형) 외 1

	건립개요
위 치 : 마포구 백범로31길 21 (舊 한국산업인력관리공단 부지) 규 모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡ (서울창업허브단지 조경공사 포함) 총사업비 : ***************************************** ****************************** 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2022. 3. 14. (35개월) 용 도 : 노유자시설(노인복지시설)

Ⅱ		추진경위

□ 2019.04.01. : 제1차 용역착수(계약체결: ‘19.03.19.)

□ 2019.07.05. : 제1회 변경계약체결(공정에 따라 상주감리원 배치 조정)

□ 2020.03.02. : 제2회 변경계약체결(안전감리원 추가 배치 등)

□ 2020.06.02. : 제2차 용역착수

□ 2020.08.24. : 제3회 변경계약체결(물가변동에 따른 계약금액 조정)

□ 2021.02.01. : 제3차 용역착수

Ⅲ		계약변경 검토

□ 관련근거

********************************

***************************

□ 변경사유 : 건축공사 연장에 따른 건설사업관리용역 기간 연장

- 건축공사 준공기한 연장: `22.3.14→`22.6.14

□ 계약내용 변경: 계약금액 및 기간연장

구분		당초	변경	증감	비고
총차	용역기간	`19. 4. 1∼`22. 3.14	`19. 4. 1∼`22. 6.14	증) 92일
	용 역 비	2,159,724,000원	2,226,617,000원	증) 66,893,000원
3차	용역기간	`21. 2. 1∼`22. 3.14	`21. 2. 1∼`22. 6.14	증) 92일
	용 역 비	1,163,348,000원	1,233,241,000원	증) 66,893,000원

Ⅳ		처리의견

□ 건설사업관리용역 기간연장에 따른 계약변경 요청 사항 이므로 총무부에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임: 관련 문서 1부. 끝.