투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약 요청[2021년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)］

우리 부서에서 시행중인 “2021년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)하였기에 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 2021년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2021. 03. 02. ∼ 2022. 3. 31.

3. 계 약 자 : ㈜주성테크  대표 김종은

4. 설계변경 사유

○ 민원처리 및 시설물 유지관리 보수물량 실 정산에 따른 공종별 증·감사항 반영

5. 설계변경 내역 : 계약금액 변경사항 없음

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감		비 고
총공사비	2,769,156,440	2,769,156,440		-
도 급 비	1,643,400,000	1,643,400,000		-
관급자재	960,487,540	960,487,540		-
이 설 비	165,268,900	165,268,900		-

붙임 : 1. 설계변경 시행 보고서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 제비율 검증확인서 1부.
4. 합의각서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	임무환		시설관리과장	03/11 라철흠
협조자
시행	시설관리과-1005	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) 한강사업본부	/
전화	3780-0828	/전송		/	waba@seoul.go.kr	/	부분공개(4)