투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	광역복합환승센터 개발실시계획(변경) 서류 제출 요청

1. 「국가통합교통체계효율화법」 제50조 및 같은 법 시행령 제49조 규정에 따라 서울특별시고시 제2021-291호(2021.6.24.)호로 광역복합환승센터 개발실시계획 승인고시된 ‘「영동대로 지하공간 복합개발」관련 강남권 광역복합환승센터 개발(우선시공분)’사업과 관련하여 1차 공사(우선시공분) 준공기한 연기에 따른 실시계획 변경(기간연장)이 필요함을 알려드립니다.

2. 실시설계적격자는 실시계획 변경절차가 조속히 이루어질 수 있도록 필요한 신청서류를 2022.3.17.(목)까지 우리부서(영동대로복합개발추진단)로 제출(1공구 총괄)하여 주시기 바랍니다.

◦ 신청서류 : 변경 신청서(변경사유 포함), 준공기한 연기 계약서, 예정공정표 등

따로 붙임 : 1. 신청서 양식 1부.
2. 참고서류 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	디엘이앤씨(주)(1공구 실시설계적격자),현대건설(주)(2,3공구 실시설계적격자),롯데건설(주)(4공구 실시설계적격자)
주무관	정용훈		사업총괄과장	이재혁		영동대로복합개발추진단장	전결 03/11 이승석
협조자
시행	영동대로복합개발추진단-1992	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 서울시청 청계청사 3층 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02)3708-2432	/전송	02)3708-2414	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개