투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차13회, 9차1회) 시행 및 변경계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차13회, 9차1회) 시행 및 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액: 18,929,900,000원(9차 7,520,621,000원)

3. 공사기간: 2007.12.31. ~ 2022.4.30.(9차 2021.8.25. ~ 2022.4.30.)

4. 계 약 자: (유)한백종합건설 외 1개사(대표 이진일)

5. 설계변경 내역(※ 공사기간 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	18,929,900,000원	19,792,960,000원	증 863,060,000원
	9차	7,520,621,000원	8,383,681,000원	증 863,060,000원

- 변경사유: 기 승인된 실정보고 및 설계변경 계약심사 결과 반영

6. 예산과목: 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차13회, 9차1회) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	최진우		방재시설부장	03/11 이동훈
협조자
시행	방재시설부-2691	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)