문서번호	정수시설과-652
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		김기윤	03/14 문인기
협 조

“마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2022년 구의아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(연간단가) 시행 계획

2022. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 구의아리수정수센터

전기설비 유지보수 공사(연간단가) 시행 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수와 긴급상황 대응 등 안정적인 전력공급을 위한「2022년도 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(연간단가)」의 시행 계획을 보고 드림

1		공사개요

□  추진근거

￮ ｢고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행 매뉴얼｣ 건설혁신과-15503(’21.12.22.)호

￮ ｢2022년도 기전설비 유지보수 일위대가｣ 기전설비과-1740(’22.2.25.)호

□  공 사 명

○ 2022년 구의정수 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

□  주요내용

○ 수변전설비공사, 배전반, 분전반 등 전원공급 설비 공사

○ 전동기 등 동력설비 및 조명설비 공사

○ 방재 및 계측설비 등 기타 센터 내 전기설비 보수 공사

정수센터 주요 전기설비 현황

◇ 변압기

위치	규격	위치	규격
*****	****************************	****	**************************
*****	****************************	****	**************************
*****	****************************	****	*****************
*****	**************************

2		세부계획
		ㅊ

□  발주방법

○ *****************

- 정수비(712), 수선유지교체비(214), 수선유지비(전기설비 유지관리)

구분	합계	1차수	2차수	비고
****	***********	***********	***********
공사기간	착공일 ~ 2023. 3. 31	착공일 ~ 2022. 12. 31.	2023. 1. 1. ~ 3. 31.

※ 발주금액 산출기준: 3개년 준공금액 평균 × 1.2 + 고용개선지원비

○ 계약방법: 장기계속계약

○ 입찰방법: (지역)제한입찰

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 있는 자

○ 공사기간: 착공일로부터 2023. 3. 31. 까지

□  추진일정

○ 2022. 3. 공사 발주 및 계약

○ 2022. 4. 착공

- 전기공급 안정도, 에너지이용 효율 향상과 안전사고 예방을 위한 공사 우선

- 신규공종 발생 시 계약금액 범위 내 선 작업 후 설계변경 및 정산

○ 2022.12. 설계변경 및 1차수 준공

○ 2023. 3. 최종준공

붙임  1. 공사설명서 및 지침서 각 1부.

2. 원가계산서 1부.  끝.