문서번호	정수시설과-1450
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순		代전준원	03/14 김훤기
협조
	주무관		김영후

22년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물정비공사 발주계획

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

2022년 뚝도아리수정수센터

건축 토목 시설물정비공사 발주계획

정수센터 시설물의 안정적 유지보수를 통하여 안전한 수돗물공급과 깨끗한 정수센터 이미지 제고에 기여코자 함.

□ 추진 방향

❍ 장기계속단가계약공사를 통한 안정적 유지보수

❍ 안전하고 쾌적한 시설 확보 및 개선

□ 발주 개요

❍ 공 사 명 : 2022년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물정비공사

❍ 도 급 액 : 490백만원(1차수 : 450백만원, 2차수 : 40백만원)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2023. 05. 30.

(1차수 : 착공일~2022.12.31.   2차수 : 2023.1.1.~2023.05.30.)

❍ 공사내용

- 토공 : 아스팔트포장절단(20m)외 21종

- 구조물공 : 몰탈바르기(바닥, 132㎡)외 12종

- 부대공 : 콘테이너형가설사무실외 2종

- 시설물공 : 난간설치(철재1ton)외 96종

- 균열보수 : 조적면(2㎡)외 14종

- 안전관리 : 소형공사안내판설치 철거(20개소)외 4종

□ 예산 현황

구분	배정된 예산	사용된 예산	잔여 예산
금액	500백만원	50백만원	450백만원

❍ 배정된 예산 : 500백만원

- 수선유지비(토목건축시설물유지관리) : 200백만원

- 수선유지비(시설물보수보강공사) : 300백만원

❍ 사용된 예산 : 50백만원

- 2021년 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물정비공사(2차수) 금액

구분	위치	작업내용	공사금액
작업지시 18	약품탱크동	트렌치 설치	8,000천원
작업지시 19	웰빙센터	휴게실 개선	9,000천원
작업지시 20	활성탄지	밀폐형 뚜껑	4,000천원
작업지시 21	탈수기동	셔터 보수	3,000천원
작업지시 22	배출수처리장	난간 설치	5,000천원
작업지시 23	취수장	난간 설치	3,000천원
작업지시 24	웰빙센터	사무실 정비	9,000천원
소계			41,000천원

- 물품 등 기타 : 9,000천원

□ 공사 발주계획

❍ 총도급액 : 490백만원(1차수 : 450백만원, 2차수 : 40백만원)

❍ 예산과목 : 수선유지교체비, 수선유지비(토목건축시설물유지관리, 시설물 보수보강공사)

❍ 입찰방법 : 제한경쟁입찰 (지역제한)

❍ 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 ① 시설물유지관리업 ② 도장·습식·방수·석공사업, 금속창호·지붕건축물조립공사업, 실내건축공사업을 모두 등록한 업체 ③ 종합건설업 중 건축공사업 ④ 종합건설업 중 토목건축공사업 등록한 업체로서 주된 영업소재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시에 소재한 업체이어야 하며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 계속 유지하여야 함.

입찰 참가자격	전문건설업 중 시설물유지관리업	전문건설업 중 실내건축공사업 외 3개업	종합건설업 중 건축공사업	종합건설업 중 토목건축공사업
적용	100%	100%	100%	100%

❍ 시공자격 업종별 추정금액

- 시설물유지관리업 : 금490,000천원(100%)

- 건축공사업 : 금490,000천원(100%)

- 토목건축공사업 : 금490,000천원(100%)

- 실내건축공사업 : 금70,514천원(14.3%), 금속창호·지붕건축물조립공사업 : 금140,818천원(28.8%), 도장·습식·방수·석공사업 : 금278,668천원(56.9%)

❍ 계약방법 : 본부(안전조사과) 심사 완료 후 본청(재무과)로 계약 의뢰

□ 향후 일정 및 계획

❍	‘22.03.	:	공사계약심사(본부 안전조사과)
❍	‘22.03.	:	공사발주(계약의뢰, 본청 재무과)
❍	‘22.04.~12.	:	1차수 공사착공 및 사업 시행
❍	‘22.12.	:	1차수 준공 및 정산 시행
❍	‘23.01.	:	2차수 공사착공 및 사업 시행
❍	‘23.05.	:	2차수 준공 및 정산 시행

붙임 : 1. 설계내역서 1부

2. 시설물 보수보강 발주계획 보고서 1부.  끝.