문서번호	교통정보과-3236
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	버스정보팀장	교통정보과장	보행친화기획관		도시교통실장
오수년	가순종	이수진	김경탁		03/14 백호
협 조
	주무관			김경진
	주무관			김인호

2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치/교체 사업 계획

2022. 03.

도시교통실

(교통정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 및 교체 사업 계획

시민들의 대중교통 정보이용 편의제공 확대를 위한 「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 」추진계획을 보고 드림

1		사업개요

□ 추진배경

○ 1개 노선 이상 시내버스 정류소 BIT 설치 확대

○ 노후(내용연수 6년 초과)로 고장이 빈번한 BIT 연차적 교체 필요

□ 설치현황

○ 시내버스 정류소 BIT 설치율 : 85.05%

(’21.12.31. 기준)

구 분	서울시	민간(KT)	소 계 (BIT대수)	BIT설치 정류소수(a)	정류소 수(b)	설치율 (a/b)
합 계	3,888	1,766	5,654	5,593	6,576	85.05%

※ BIT 중복설치 61대 (중앙 및 환승정류소 등)

○ 년도별 BIT 설치현황                                    (’21.12.31. 기준)

구 분	’07년 ~’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	‘20년	’21년	소계	합계
서울시	793	76	175	503	420	513	715	406	287	3,888	5,654 (중복61대 포함)
민 간 (KT)	-	1,735	-	-	-	-	-	43	-12	1,766

○ BIT 설치 형태

독립형	승차대형	알뜰형	미니형

2		사업대상 및 추진방향

□ 사업대상 및 설치기준

○ 조사 대상

-  자치구 수요 : 설치 요구대상 252개소

-  교통정보과  : 민원, 노후(내용연수 6년 초과) 및 반복 고장 300개소

○ BIT 대상선정 및 설치 기준

- 신설 : 정확도(80%), 승차인원(50명 이상), 민원 등을 고려

- 교체 : 내용연수(6년)가 초과된 BIT 중 반복 고장 발생 개소

- BIT 설치 기준 : 독립형(노선수 7개 이상), 알뜰형(노선수 6개이하), 미니형(노선수 1개)

□ 주요 추진 방향

○ (중대재해처벌법) 신인도 및 안전분야 강화

- 협상에의한계약 개선 사항 반영 : 재무과-6545, ’22.2.14.(’22.2.15.부터 반영)

▶ 신인도 점수조정 : 5(△1.3) ⇒ 6(△6)

▶ 정성적 평가(안전 및 품질분야) : 4 ⇒ 6

※ 별첨 : 제안서의 평가항목 및 배점 조정 내역

○ (의회 지적사항) 다수업체 참여 유도 및 구별 설치율 개선 - 행감(제303회)

구 분	기존	변경
업체간 경쟁유도 (입찰방법)	3개 공구 - 공동계약 · 컨소시엄 구성으로 실적 및 기술인력이 우수한 업체 유리	1개 공구 - 단독계약 · 단독계약으로 업체 간 경쟁 유도
다수업체 참여확대 (제안서평가)	정량적평가(30점) · 참여인력, 수행경험(금액·건수) 점수 비중이 높고 실적, 경험이 적은 업체 참여 불가	정량적평가(20점) · 참여인력, 수행경험 점수를 조정하여 다수업체 참여 가능토록 진입 장벽 완화
	가격평가(20점) · 입찰가격에 대한 가격경쟁력 제고 필요	가격평가(30점) · 점수 상향 조정으로 가격경쟁력 확보
설치율 평준화	- BIT 설치율이 낮은 구 신설시 우선 선정 -종로(설치율 67.4%) 6대, 서초구 2대, 구로구 2대 등

○ (전원확보) 가로등 상시전원 활용으로 공사비 및 굴착복구비 절감

- BIT 전원확보에 어려움이 많고 과다한 굴착 복구비 발생

- ’21년 이후 가로등공사시 상시전원 포설하고 있어 이를 적극 활용

(’21년, 28개 노선, ’22년 사업대상 19개 노선)

3		시행 계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기 설치 및 교체 사업 및 감리용역

- 자체설계 및 감리용역 별도 발주

○ 사업기간 : ’22. 5월. ~ 12월.(8개월)

○ 사업규모 : BIT 140대 설치/교체

- 신설 :  30대(독립형 3대, 알뜰형 19대, 미니형 8대)

- 교체 : 110대(노후 독립형)

○ 소요예산 : 총 1,383,500천원                               (단위: 천원)

구 분	계	사무관리비	시설비	감리비	시설부대비
BIT 설치/교체	1,383,500	1,000	1,315,000	65,750	1,750

- 예산과목 : 도시교통실 교통정보과, 과학적인 교통정보서비스구현, 과학적 교통운영체계구축, 버스정보안내단말기(BIT) 설치

□ 2022년 버스정보안내단말기 설치 및 교체 - 물품구매/설치

○ 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기 설치 및 교체 사업

○ 입찰방법 : 제한경쟁(중소기업자)

○ 낙찰자 결정방법 : 협상에 의한 계약

□ 2022년 버스정보안내단말기 설치 감리용역

○ 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 감리용역(기술용역)

○ 입찰방법 : 제한경쟁(지역제한)

○ 낙찰자 결정방법 : 적격심사

4		향후계획

□  ’22.03. : 사업방침 수립, 일상감사, 계약심사, 사전공고, 사업발주

제안서 평가위원회 실시

□  ’22.04. : 제안서평가위원회, 사업자선정(계약)

□  ’22.05. : 사업 착수

□  ’22.05. ~ 08. : 현장조사 실시 및 BIT 제작

□  ’22.09. ~ 12. : BIT 설치 및 서비스

5		기대효과

□ 버스정보 제공 확대를 통한 버스정보 서비스 소외지역 해소

□ 노후 단말기 교체하여 장애 발생 최소화 및 대중교통이용 편의 향상

붙임 : 1. 제안서 평가항목 및 배점 조정 내역 1부.

2. 일괄발주검토서 1부.

3. 신설 및 교체 대상 1부.  끝.