문서번호	하천관리과-3304
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수총괄팀장	하천관리과장
강희권		김지환	03/14 손경철
협조
	주무관		조현범

준공기한 연기 검토보고

(서울시 내수침수 위험지역 실시간 예측기술 고도화 용역)

2022. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

「서울시 내수침수 위험지역 실시간 예측기술 고도화 용역」

준공기한 연기 검토보고

집중호우 등에 신속히 대응하고자 개발중인 도시침수예측시스템(내수침수 위험지역 실시간 예측기술)에 대하여 수방기간 운영을 통한 검증 및 개선을 위하여 준공기한을 연기코자 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 서울시 내수침수 위험지역 실시간 예측기술 고도화 용역

○ 용역기간: 2021.5.27. ~ 2022.3.22.

○ 용 역 사: *************

○ 용 역 비: ******

○ 용역내용

- 수방시설 전반을 고려한 도시유출해석 및 침수심 정보 생산체계 구축

- 상세 격자단위 침수시나리오 및 구단위 침수위험정보 생산

- 포인트단위 침수취약지역 추정 및 한계강우량 분석

- 도시침수 예측시스템 개선 및 수방기간 운영

□ 추진경위

○ `21.05.27.       : 용역 착수

○ `21.06.~`21.10.: 서울시 수방시설을 고려한 도시유출해석 및 침수심 정보 생산체계 구축

○ `21.12.10.       : 용역 중간보고(1차)

○ `21.10.~`22.03.: 시나리오 기반 고해상도 침수지도 작성, 행정구역 단위 침수위험지역 추정, 자치구별 포인트 단위 침수위험지역 및 한계 강우량 산정

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	2021.5.27~2022.3.22.	2021.5.27~2022.10.31.	용역비 변동 없음

○ 준공기한 연기사유

- 개발 및 고도화 추진중인 서울시 도시침수 예측시스템의 산출된 침수위험지역에 대하여 금년 여름철(풍수해 대책기간) 운영을 통하여 검증하고 보완사항에 대해서 개선코자 준공기한 연기

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금: 미부과

□ 조치사항

○ “서울시 내수침수 위험지역 실시간 예측기술 고도화 용역” 준공기한 연기 의뢰(재무과)

□ 향후계획

○ `22.04.          : 용역 중간보고(2차)

○ `22.05.~`22.09.: 침수예측시스템 운영(보완사항 검토 및 개선 등)

○ `22.10.          : 용역 최종보고 및 준공

붙  임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.