문서번호	도시철도설비부-2265
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

					시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
이은석	배광희	김중영	하종현		03/14 이정화
협 조
	총무부장			구본상
	재무과장			전성권

「위례선 트램 차량 구매」

계약변경(수량변경) 추진 계획

2022.  03.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

(위례선 트램 차량 구매)

계약변경(수량변경) 추진계획

위례선 건설사업 기본계획에 따른 트램 10편성 제작구매를 위해 기존 계약분(9편성)에 대해 수량변경(1편성 증)을 추진하고자 함

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 구매 개요

(제안서 조감도, 디자인 승인 전)

○ 사 업 명 : 위례선 트램 차량 구매

○ 트램형식 : 배터리 지붕탑재형 무가선저상트램

○ 편 성 수 : 9편성 (5모듈/1편성)

○ 계약금액 : 343.71억원

○ 사업기간 : ’21.12.15. ~ ’25.08.26.

○ 계 약 자 : ㈜우진산전

	< 위례선 건설사업 사업개요 >
◾ 위 치 : 마천역~복정역, 남위례역 ◾ 규 모 : 연장 5.4㎞, 정거장 12개소, 차량기지 1개소 ◾ 공사기간 : '21.11. ~ '25.9. ◾ 총사업비 : 2,614억원(LH·SH 전액 부담) / 차량비 386억원

□ 추진경위

○ ’20.10.29 : 위례선 도시철도 건설사업 기본계획 승인

○ ’21.02.25 : 계약심의회 심의 (결과 : 건설공사, 차량 분리발주 검토)

○ ’21.04.30 : 트램 조달청 계약 의뢰 (10편성 386억원)

○ ’21.08.19 / 09.01 : 2회 무응찰 유찰

○ ’21.09.13 : 원가계산 용역 시행 *****************

○ ’21.10.15 : 위례선 트램 구매 변경계획 수립

○ ’21.10.18 : 조달청 계약 의뢰 (9편성 390.33억원)

○********************************

○*********************************************

○************************

Ⅱ		계약변경 추진

□ 변경사유

○ 위례선 건설사업 기본계획에 따라 트램 차량을 10편성 구매하여야 하나 사업비 부족으로 9편성을 선구매 계약 체결함

- **************************************************************************

○ 입찰결과 저가 입찰로 기존 차량구매 사업비******* 내에서 1편성 증편 가능하므로 수량 변경 계약을 추진하고자 함

□ 변경내역

구 분	당 초 (9편성)	변 경 (10편성)	증 / 감
계약기간	’21.12.15. ~ ’25.08.26.	좌 동	-
수 량	9편성 (45모듈)	10편성 (50모듈)	증) 1편성(5모듈)
계 약 액 (천원)	**********	**********	************

******************************************************

******************************************

Ⅲ		향후계획

□ 향후일정

○ ’22.03.14.          : 변경계약 의뢰 (도기본 → 조달청)

************************************************

- 철도차량 형식승인을 위한 임시 기술기준 마련(국토부 협의) 동시 진행

※ 노면전차에 대한 기술기준이 없으므로 임시 기술기준을 마련해야함

***********************************************

*********************************

붙 임 : 변경내역서 1부.  끝.