문서번호	시설과-1254
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
강성기	김현태	박종수	03/15 박미애
협 조

「어린이대공원 시설 재정비 사업 일환」

CCTV 및 통신케이블 구축 계획

2022.  03.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

「어린이대공원 시설 재정비 사업 일환」

CCTV 및 통신케이블 구축 계획

어린이대공원 시설 재정비 사업의 일환으로 공원내 24시간 개방 대비

CCTV 및 통신케이블을 구축하여 이용시민의 안심과 안전사고 예방에

철저를 기하고 함

□ 추진근거

❍ 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인(행정자치부, ’15.1.12)

❍ 서울특별시 영상정보처리기기 설치 및 운영에 관한 조례(’16.9.29.)

❍ 설계 및 감리대상인 공사의 범위(정보통신사업법 제6조 제1항 제8조 제1항, 22.02.18.)

❍ 어린이대공원 시설 재정비 추진계획 수립(푸른도시국, ’21.6.28)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 어린이대공원 CCTV 및 통신케이블 구축 공사

❍ 위    치 : 서울시 광진구 능동로 126(어린이대공원)

❍ 사업대상 : CCTV 및 관련 통신 시설

❍ 시설현황

****	****
	*	****	***** **	****** **	****** **
***** ***	***	****	***	**	****
	***	****	***	**	****

❍ 사업기간 : 2022. 3. ~ 9

❍ 사 업 비 : *********************

- 설계내용 : 실시설계용역

- 공사내용 : 관급자재(CCTV, 광케이블), 토공사, 비상벨 등 설치

❍ 예산과목

- 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리

및 이용 활성화, 어린이대공원 시설 재정비, 시설비(205-401-01)

❍ 사업내용

- 안전사고와 범죄 발생 예방통해 공원을 이용하는 시민에게 안전한 환경조성

- 공원내 신규CCTV 및 케이블 설치 등 효율적인 통합안전시스템 구축

****	***	***	*******
****	**	*	***********
***	*	*	****
******	*	*	********
****	*****	*	************

※ CCTV : 200만 화소 이상 설치(현장 여건 및 설계용역에 따라 설치대수 등 변동 가능)

□ 시행계획

■ 설계용역 시행 방법

❍ 과업내용 : 어린이대공원 CCTV 및 통신케이블 구축사업 설계용역

❍ 계약방법 : 수의계약(여성기업)

❍ 소요예산 : *****

❍ 기    간 : 착공일로부터 60일

❍ 계약자격

- 엔지니어링사업(정보통신) 업종 또는 기술사사무소(정보통신) 업종을 등록한 업체

- 여성기업지원에 관한 법률에 의한 여성기업 등록 업체

■ 공사 시행 방법

❍ 계약방법 : 수의계약(여성기업)

❍ 과업내용 : 어린이대공원 CCTV 및 통신케이블 구축 공사

❍ 소요예산 : ****************************

❍ 기    간 : 착공일로부터 80일 이내

❍ 계약자격

- 정보통신사업법에 의한 정보통신공사업 면허 보유 업체

- 여성기업지원에 관한 법률에 의한 여성기업 등록 업체

※ 실시용역 결과에 따라 소요예산, 기간 등 시행방법 변동 가능

□ 행정사항

❍ 사업추진계획 수립, 기술용역타당성심사 설계용역 : `22. 3. ~ 4

❍ 용역 계약 및 시행 : `22. 4. ~ 5

- CCTV 신규설치 장소는 어린이대공원 관리부서에서 협의(선정)위치 설계용역 시 반영

❍ 공사발주 전 준비 및 행정절차 이행 : `22. 5 ~ 6

- 관급자재 구매, 정보화사업 보안성 검토, 특정제품 선정, 행정예고 등

❍ 공사 발주 및 계약 : `22. 6

❍ 공사 시행 및 준공 : `22. 6 ~ 9

첨부 : 어린이대공원 옥외 CCTV 및 광케이블 배치도 1부.  끝.