문서번호	기전설비과-2321
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
민성준		최강욱	03/16 代백광인
협 조
	주무관			라승보
	주무관			이준모
	주무관			김상신

도급사업 안전확보방안 이행여부 점검 결과

2022. 3.

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

도급사업 안전확보방안 이행여부 점검 결과

중대재해처벌법 시행 관련, 추진 중인 도급사업(강북 활성탄지 회수시설 개선 기계공사 외 15건)에 대한 감리 및 수급자의 안전확보방안 이행여부를 점검 후 결과를 보고함

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’22. 3. 8.(화) ~ ’22. 3. 10.(목)

○ 점검대상 : 추진 중인 3개 사업(세부사업 16건)

연번	사 업 명	세 부 사 업	계약업체	사업기간	비고
1	강북정수센터 활성탄지 회수시설 개선	7건 (감리용역, 기계공사, 회수펌프, 전기공사, 계측제어공사, 배전반, 계장제어장치)	대한콘설탄트 외 6개 업체	’21. 4. ∼ ’22. 3.	감리 용역 시행 중
2	강북정수센터 고도정수처리시설 확장	5건 (기계공사, 시운전용역, 전기공사, 계장제어장치, 활성탄 투입 및 포설)	신작로 외 4개 업체	’20. 11. ∼ ’22. 4.	감리 용역 시행 중
3	강북정수센터 탈수설비 개량	4건 (탈수기, 기계공사, 전기공사, 계측제어공사)	동일캔바스엔지니어링 외 3개 업체	’21. 5. ∼ ’22. 4.	직접 감독

○ 점 검 자 : 총3명(기전설비과 사업 담당 2, 생산관리과 사업 담당 1)

○ 점검방법

- (1·2번 사업) 현재 작업 미진행 중인 사업이 대다수로, 감리 대상                   서류 점검 실시

- (3번 사업) 작업시기 도래 세부사업(탈수기) 위주로 현장점검 실시하고,               미도래 사업은 추후 작업진행 시 현장점검 실시

○ 점검내용 : 도급사업 감리 및 수급자의 안전확보방안 이행 여부

- 아리수 안전 레드카드 제도 운영

‣ 레드카드 발급 일자, 내용, 횟수 등 발급이력 관리 여부

- 위험성 평가 관련 사항

‣ 작업착수 전 실시한 위험성 평가의 조치사항 이행 여부 등

‣ 수시 위험성평가 실시 필요 여부

- 안전관리비 사용실태

‣ 안전관리비 집행 적정 여부, 구입한 안전장구의 실제현장 사용 여부 등

- 작업 전 10분 안전점검(TBM) 실시 여부

‣ 안전점검 체크리스트 제작 및 사용 여부

- 그 외 안전 관련 사항 등

□ 사업별 점검결과

○ 강북정수센터 활성탄지 회수시설 개선

- 점검결과

점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과	조치필요사항
안전 레드카드 제도 운영	○ 레드카드 발급일자, 내용 등 이력 관리	○ 안전 레드카드 제도 시행은 인지 ○ 이력 관리 미흡 - 현장 안전관리 확인여부, 카드발급 유무, 횟수 등	이력 관리 문서화
위험성 평가 관련 사항	○ 작업착수 전 실시한 위험성평가 조치사항 이행 여부	○ 시기가 지난 작업 및 미진행 작업의 경우, 이행결과 확인 어려움	이행 결과 문서화
안전관리비 사용 실태	○ 안전관리비 집행 여부 ○ 안전장구의 실제 현장 사용 여부	○ 집행 적정 - 안전장구(안전화, 안전모, 안전벨트 등) 구입, 재해예방기술지도 등에 사용 ○ 작업현장에 안전장구 비치
작업 전 10분 안전점검 (TBM) 실시	○ 안전점검 실시 여부	○ 작업 시 안전점검 체크리스트 관리 중 - 감리사에서 보고서 주기적 제출 중
		○ 체크리스트에 ‘휴대전화 사용 안전수칙’ 항목 없음	휴대전화 사용 안전수칙 항목 추가
그 외 사항	○ 안전 관련 사항 확인	○ 현장에 ‘작업 중 휴대전화 사용금지’ 홍보물 부착

- 점검사진

서류 점검	안전장구 비치	TBM 실시	‘작업중 휴대전화 사용금지’ 홍보물

○ 강북정수센터 고도정수처리시설 확장

- 점검결과

점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과	조치필요사항
안전 레드카드 제도 운영	○ 레드카드 발급일자, 내용 등 이력 관리	○ 안전 레드카드 제도 시행은 인지 ○ 이력 관리 미흡 - 현장 안전관리 확인여부, 카드발급 유무, 횟수 등	이력 관리 문서화
위험성 평가 관련 사항	○ 작업착수 전 실시한 위험성평가 조치사항 이행 여부	○ 시기가 지난 작업 및 미진행 작업의 경우, 이행결과 확인 어려움	이행 결과 문서화
안전관리비 사용 실태	○ 안전관리비 집행 여부 ○ 안전장구의 실제 현장 사용 여부	○ 집행 적정 - 안전유도원 인건비, 안전장구 구입, 재해예방기술지도 등에 사용
작업 전 10분 안전점검 (TBM) 실시	○ 안전점검 실시 여부	○ 작업 시 안전점검 체크리스트 관리 중 - 감리사에서 보고서 주기적 제출 중
		○ 체크리스트에 ‘휴대전화 사용 안전수칙’ 항목 없음	휴대전화 사용 안전수칙 항목 추가
그 외 사항	○ 안전 관련 사항 확인	○ 현장에 ‘작업 중 휴대전화 사용금지’ 홍보물 부착

- 점검사진

서류 점검	안전관리비 사용 내역	TBM 실시	‘작업중 휴대전화 사용금지’ 홍보물

○ 강북정수센터 탈수기 제작구매 설치

- 점검결과

점검항목	점 검 내 용	점 검 결 과	조치필요사항
안전 레드카드 제도 운영	○ 레드카드 발급일자, 내용 등 이력 관리	○ 기전설비과 관리 중 - 직접 감독 사업으로, 현장 점검 시마다 안전 레드카드 운영 예정
위험성 평가 관련 사항	○ 작업착수 전 실시한 위험성평가 조치사항 이행 여부	○ 시기가 지난 작업 및 미진행 작업의 경우, 이행결과 확인 어려움	이행 결과 문서화
안전관리비 사용 실태	○ 안전관리비 집행 여부 ○ 안전장구의 실제 현장 사용 여부	○ 물품구매 사업으로, ’21년도 발주 시 안전관리비 미반영	예산상황으로 인해 반영 어려움 (사고이월사업)
작업 전 10분 안전점검 (TBM) 실시	○ 안전점검 실시 여부	○ 안전점검 체크리스트 관리 미흡 ○ 체크리스트에 ‘휴대전화 사용 안전수칙’ 항목 없음	금회 점검 시 현장에서 즉시 계도 조치
그 외 사항	○ 안전 관련 사항 확인

- 점검사진

서류 점검	작업현장 점검(실외)	실내 작업현장 점검(실내)

□ 향후계획

○ 점검결과, 안전확보방안의 이행이 미흡한 사항(상기 조치필요사항)은   해당사업의 감리 및 수급자에게 이행 독려

- 아리수 안전레드카드 발급이력 관리, 위험성평가 조치사항 이행결과 문서화,   작업현장 안전관리 철저 등

○ 안전관련부서에서 도급사업 안전확보방안 추가 마련 시, 감리 및  수급자에게 안내.  끝.