“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행〔방배배수지(1지) 내부방식공사〕

우리 사업소에서 시행중인「방배배수지(1지) 내부방식공사」에 대하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 방배배수지(1지) 내부방식공사

나. 공사개요: 도막식 7,200㎡, 패널식 2,688㎡, 단면보수 등

다. 공사기간: 2021.6.7. ~ 2022.3.31.

라. 도 급 자: 라보산업(주)  대표 이예슬

마. 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처 유재호

바. 계약금액 변경금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 ․ 감(원)	비 고
도 급 비	850,349,500	774,081,000	감)76,268,500

사. 설계변경 사유: 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 계약금액 변경

아. 예산과목(사고이월): 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

수선유지비[배수지내부방식공사, 22208]

※ 기추산필 2022.1.14. No. 1101

감추산필 2022.3.16.

붙임: 1) 설계변경 심의결과 보고서 1부.

2) 설계변경 심의의견서 1부.

3) 설계변경 사유서 1부.

4) 설계변경 내역서 1부.

5) 제비율 검증확인서 1부.

6) 설계변경 합의서 1부.  끝.

안전관리팀장	홍정식		주무관	김민건		시설관리과장	김근태		강남수도사업소장	03/16 박기용
협조자
시행	시설관리과-4199	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4903	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(5)