투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 공사 승강기 설치에 따른 토목공정 완료 요청

율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선 공사와 관련하여 승강기 공사 착수일이 공정상 2022.3.10.이었으나 선행 작업이 미비되어 작업 착수를 못하고 있으니, 아래 사항을 2022.3.21까지 완료하시어 승강기 설치 공사에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 최상층 출입구 부분 유공발판 작업 및 난간대 작업

나. 1층 출입구 주변 되메우기 작업

다. 승강로 주변 시스템 비계 작업 등

붙임 : 율곡로 창경궁앞 도구구조개선 공사 착공 관련 안내문.  끝

	설비부장
주무관	최영주		도로설비과장	문학준		설비부장	03/16 김호성
협조자
시행	설비부-3292	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr/
전화	02-3708-8637	/전송	02-3708-8659	/	cyj12as@seoul.go.kr	/	부분공개(5)