문서번호	도로보수과-1694
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최우람		엄기영	03/15 이경우
협조

『2021/22년 제설작업 용역(장기계속)』설계변경(총차 2회, 2차 1회) 검토보고

『‘21/‘22년 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(총차 2회, 2차 1회) 검토보고(정산)

2022. 3.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2021/22년 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(총차 2회, 2차 1회) 검토보고(정산)

’21/22년 제설작업 효율화 증대를 위해 추진한 『민간 제설작업 용역』에 대한 설계변경(정산) 검토보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 21~22년 제설작업용역(장기)(성동)

○ 계약금액 : ***********

- *************************************

○ 용역기간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 31.

○ 용 역 사 : 장춘건기 주식회사 대표 김주진

□ 설계변경 개요

○ 건  명 : 제설용역 완료에 따른 용역비 정산

○ 사  유 : 기상상황에 따라 당초 계약수량 대비 실 수량 증·감

○ 변경내역(총차 2회, 2차 1회)

- 용역기간

구 분		변경 내역		비 고
		변경 전	변경 후
총 차		‘21.11.15. ~ ‘22.03.31.	변경 없음
	1 차	‘21.11.15. ~ ‘21.12.18.	변경 없음	1차 준공 (’21.12.)
	2 차	‘21.12.19. ~ ‘22.03.31.	변경 없음

- 용역금액 : ***********

(단위 : 천원)

공 종		변경 내역[정산]			비 고
		변경 전	변경 후	증·감
총 차		*******	*******	********
	1 차	*******	*******	*	1차 준공 (’21.12.)
	2 차	*******	*******	********

- 공종별 물량 증·감 내역

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	단위	변경 전			변경 후			증·감
			1차	2차	총차	1차	2차	총차
제설인력	상황반장(주간)	hr	**	**	**	**	***	***	*****
	상황반장(야간)	hr	*	**	**	*	**	**	*****
	상황대기원(야간)	일	**	**	***	**	**	***	*****
	제설작업원(주간)	hr	**	***	***	**	***	***	*****
	제설작업원(야간)	hr	**	***	***	**	***	***	******
	제설장비운전원 (덤프, 백호)-주간	hr	**	***	***	**	***	***	****
	제설장비운전원 (덤프, 백호)-야간	hr	**	***	***	**	***	***	****
	제설장비운전원 (15톤크레인)-주간	hr	*	*	**	*	*	**	*
제설장비	제설장비대기	hr	*	*	*	*	*	*	****
	제설작업(추가투입)	hr	*	*	*	*	*	*	****
	제설장비 작업유류비	hr	***	***	***	***	***	***	****
	제설장비 대기(백호)	hr	**	***	***	**	***	***	****
	제설작업(백호)	hr	**	**	**	**	**	**	****
	제설제 운반	hr	*	*	*	*	*	*	****
	가설사무실	hr	*	*	*	*	*	*	****
	제설장비(크레인)	hr	*	*	**	*	*	**	*
	제설장비월임대료	월	***	***	*	***	***	*	*

□ 검토의견

○ 상기와 같이 정산을 위한 설계변경을 실시하여『2021/22년 제설작업 용역(장기계속)』업무추진에 만전을 기하고자 함

□ 향후계획

○ ‘22. 3월중 : 소요예산(*****) 추가 재배정 요청(도로관리과)

[※ 제설용역(2차분) 기 재배정 예산 : ******]

붙임  1. 설계변경내역서[총차분, 제2회(정산)] 1부.

2. 설계변경내역서[2차분, 제1회(정산)] 1부.  끝.