문서번호	정수시설과-1231
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		이재복	03/17 이달영
협조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

자동제어시스템 매체제어(SGA) 서버 교체 계획

2022. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

자동제어시스템 매체제어(SGA) 서버 교체 계획

우리 정수센터 자동제어시스템 보안강화를 위해 매체제어(SGA) 서버를 교체 계획을 보고함

Ⅰ		추진배경

□ 추진목적

○ 정수센터 자동제어시스템 내 보안이 취약하고 노후한 매체제어(SGA) 서버를 교체하여 보안 강화 필요

□ 장비현황

구 분	수 량	모 델 명	설치연도	비 고
매체제어(SGA) 서버	2대	IBM System X3250 M4	2013년

※ SGA : USB, CD 등으로 시스템 접속 및 무단으로 새로운 프로그램 설치를 차단하는 프로그램

SGA 서버	접속 화면

Ⅱ		추진사유

□ 문제점

○ 자동제어시스템 매체제어서버 운영체제(WindowsServer2008)가 마이크로소프트사의 기술지원 중단으로 보안성 취약점이 발생할 우려가 있어 운영체제 업그레이드 필요

○ 서버가 2013년에 설치되어 내용연수(6년)를 경과하여 성능저하 및 고장 발생 우려

□ 개선대책

○ 매체제어 서버 2대 하드웨어 교체 및 운영체제 업그레이드 시행

Ⅲ		추진계획

○ 건 명 : 자동제어시스템 매체제어(SGA) 서버 구매설치

○ 소요예산 : 30,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수센터 시설정비, 시설비 및 부대비, 시설비(자동제어시스템 매체제어(SGA)교체)

○ 계약방법 : 수의계약

- 근 거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 가목

- 사 유 : 추정가격이 소액이고 타 정수센터 서버 납품 경험이 있는 업체와 수의계약 시행

Ⅳ		향후 계획

○ 2022. 3월 : 발주 절차 진행 및 계약체결

○ 2022. 4월 : 서버 제작․설치

○ 2022. 5월 : 시운전 실시, 사업 완료.  끝.