문서번호	설비부-3366
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
최환수		배수웅	03/17 김호성
협조

『경인고속도로 입구교차로 교통신호기 공사』

실정보고 검토보고

2022. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

『경인고속도로 입구교차로 교통신호기 공사』

실정보고 검토보고

『경인고속도로 입구교차로 교통신호기 공사』와  관련 건설사업관리단의 실정보고를 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

1
		관 련 근 거

□ 한종 국회 2022-150(2022.3.16.)

【실정보고-교통신호기 공사 실정보고 승인요청】

□ 대영-2203-03 (2022.3.10.)

【경인고속도로 입구교차로 교통신호기 실정보고 제출】

2
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 경인고속도로 입구교차로 교통신호기공사(국회대로 2-2공구)

□ 위    치 : 선유고가도로 철거 현장

□ 계약금액 : 31,383,000원

□ 공사기간 : 2021. 12. 21. ~ 2022. 3. 31.

□ 계약업체 : ㈜대영디엔에프씨

□ 건설사업관리단 : 한국종합기술

3
		검 토 내 용

□ 실정보고 주요내용

○ 변경 사유 및 변경 내용요약

1) 준공기한 연장 (22.3.31 → 22.6.30)

- 사유 : 선유고가 철거공사의 단계별(2구간 양화대교 방면) 철거

시점에 교통신호기가 설치되어야 하나, 철거 시점이 5월로

예정되어 있어 후속공정인 교통신호기 준공기한 연장이 필요함.

2) 현장여건 고려한 내역변경 반영

- 선유고가 철거로 경인고속도로 입구교차로는 4지 평면교차로가 됨에

따라 차량신호등 교체 필요 (3색등 → 4색등) 하며 및 차량신호등 부착대 변경

(기존 11m → 7m 로 변경)

○ 주요변경 내역

품 명 / 규 격		단위	수 량			비 고
			당초	변경	증·감
차량신호등 철거	LED,1면2,3,4색 (경보등 포함), 2조동시	조	0	5	5
차량신호등 설치	LED, 1면4색(사급) 2조 동시	조	1	2	1
지주부착대 설치	용융아연도금, Ø80㎜×7M	본	0	1	1
지주부착대 철거	각종(용융,디자인,KS흑관) Ø80㎜×7M	본	2	3	1
차량신호등 이설	LED,1면2,3,4색(경보등 포함) 2조동시	조	0	1	1
지주부착대 이설	각종(용융,디자인) Ø100㎜×11M	본	0	1	1
보행, 잔여시간, 보조등 철거	LED, 1면2,3색 (숫자,도형) 1조	조	0	4	4
교통신호등 지주 철거	용융아연도금, 디자인, KS흑관, Ø250㎜×8M	본	0	1	1
교통신호등 지주 철거	용융아연도금, 디자인, KS흑관, Ø200㎜×8M	본	0	1	1
기초앙카 부분제거(T=30㎝)	Ø250㎜×0.3M	EA	0	2	2
기초앙카 부분제거(T=30㎝)	Ø200㎜×0.3M	EA	0	1	1
시각장애인용 음향신호기	본체(공통)-고재별도	대	0	2	2

○ 공사비 증·감 검토결과

구분	금 액(천원)
	당초	변경	증감
직접공사비	21,287	25,704	증 4,417
간접공사비	7,243	9,506	증 2,263
소 계	28,530	35,210	증 6,680
부가세	2,853	3,521	증 668
도 급 액	31,383	38,731	7,348

○ 종합 검토의견(건설사업관리단)

- 선유고가 철거공사의 단계별 철거 일정에 맞추어 경인고속도로 입구

교차로의 교통신호기 공사기간 변경(준공예정일 22.03.31 → 22.06.30)과

- 선유고가 철거로 인한 4지 평면교차로의 차량신호등 변경(3색등→4색등),

철거공사 간섭에 따른 차량신호등 부착대 교체(1본, 11m→7m) 등 현장

여건을 고려한 내역 변경이 타당함.

4
		보 고 자 의 견

□ 건설사업관리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○  관련법규, 기술기준 및 현장여건 등을 반영하여 판단한 사항으로 건설사업관리단 검토보고는 적정하여 승인(통보)하여 우선 시공하도록 조치하고, 승인내역은 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.