투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	평화의 공원 현장노동자 대기실 신축 설계용역 준공기한 연장 시행

1. 시설과-1704호(2022. 3. 10.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인『평화의 공원 현장노동자 대기실 신축 설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 평화의 공원 현장노동자 대기실 및 창고 신축 설계용역

나. 용역기간 : 2021. 6. 7. ~ 2022. 4. 1.

다. 계약금액 : ****************************

라. 계약업체 : ****************

마. 준공연장 내용

구 분	계약기간	비고
당초	2021. 6. 7. ~ 2022. 4. 1.	-
변경	2021. 6. 7. ~ 2022. 7. 30.	120일 연장

바. 연장사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미 부과

아. 설계변경 및 준공기한 연장사유

- 기 계획된 사업 대상 건축물의 위치 변경으로 대상지 재선정 검토 및   부지 경계 측량

- 위치변경에 따른 새로운 평면 작성 및 협의, 그에 따른 입면도 작성

- 변경 등의 사유로 인해 도시공원위원회 심의 상정이 늦어지는 등 용역 기간 절대 부족

붙임  1. 평화의 공원 현장노동자 대기실 신축 설계 용역 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 월드컵 공원 조성(변경)계획 사전협의 결과 보고 1부.

3. 평화의 공원 현장노동자대기실  신축 협의 결과 보고 1부.

4. 설계기간 연장요청사항*********** 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김효식		토건시설팀장	송석주		시설과장	03/17 임종훈
협조자
시행	시설과-1847	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5567	/전송	02-300-5569	/	narechan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)