문서번호	아이돌봄담당관-20008
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		거점조성팀장		아이돌봄담당관
김성희		김삼성		03/21
				김연주
협 조
	거점운영팀장				代심주현

- 4호(구로) 거점형 키움센터 조성 -

설계용역 기간변경(연장) 검토 보고

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 4호(구로) 거점형 키움센터 조성 -

설계용역 기간변경(연장) 검토 보고

‘4호(구로) 거점형 키움센터 조성’과 관련하여 아동돌봄시설로서 안전하고 내실있는 실시설계 협의 및 추진을 위하여 과업수행에 필요한 용역기간을 연장******하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제14장 제7절 제2호

(계약기간의 연장)

Ⅱ		용역개요

□ 용 역 명: 4로(구로) 거점형 키움센터 조성 설계용역

□ 대 상 지: 구로구 *********************

□ 용역기간: **********************************

□ 계약업체: **************************

□ 계약금액: ************************

□ 과업내용: ********************************

*****************************************************

Ⅲ		추진경위

□ 설계용역 시행계획 방침	’21. 10. 27.

□ 설계용역 계약 및 착수	’21. 12.  9.

□ 거점형 키움센터 공간·운영 기획 TF 자문	’22.  2. 11. ~  2. 21.

□ 유니버설 디자인 수시 컨설팅	’21.  2. 14. ~  2. 28.

□ 설계용역 기간 연장 신청(계약자)	’22.  3. 18.

Ⅳ		변경내용 및 검토

□ 변경내용: 용역기간 연장 (준공기한 연기)

당초 용역기간	변경 용역기간	연장일수
*********** ************	*********** *************	****

※ **************

□ 변경 사유

**********************************************************************************************************************************************

*************************************************

□ 연기에 따른 귀책소재: 계약상대자의 책임이 없는 사유에 해당

□ 지연배상금 부과여부: 미부과

Ⅴ		처리계획

□ 재무과에 용역 변경계약 의뢰코자 함.

Ⅵ		향후일정

□ 설계용역 완료	’22.  5.

□ 공사 발주 및 추진	’22. 6. ~ ’22. 11.

붙임 1) 계약업체 용역기간 연장요청 서류 1부.

2) 합의각서 1부.  끝.