문서번호	시설보수과-20026
결재일자	2022. 3. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		오재영	03/23
			김용제
협조

공단IC 유지관리 추진계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3

강서도로사업소

시설보수과

"공단IC" 유지관리 추진계획 검토 보고

우리사업소 관리대상 시설인 "공단IC"에 대하여 정밀점검용역결과 1순위 보수물량에 대한 유지관리계획 조치계획 보고 임

□ 시설현황

시설명	위치	구조형식	연장 (m)	폭 (m)	준공년도	비고
공단IC	구로구 구로동 700	ST-B PFS	374	7~23	1991	2종

《현장 사진》

□ 보고내용

○ 정밀안전점검 용역관련 보고

- 정밀안전점검용역 시행 : ‘20. 2. 28 ~’21. 3. 20

- 안전등급 : B등급

- 주요내용 : 정밀안전점검 용역 결과 1램프 스틸박스 구간에 도장박리등

녹 발생이 확인되어 보수가 필요함.

<현황사진>

<2020년 용역결과 보고서 보수.보강 개략공사비> --(p466)

※ 1순위 시설로 2년내 보수가 필요함

○ 현장조사 결과 보고

- 2021년 용역시행이후 1램프 구간의 녹발생이 증가된 상태임

- 상기 지역은 일반 상업지역 부근에 위치하고 있고 직장인과 시민의

통행이 빈번한 지역으로, 주민안전 및 시설물 성능향상을 위해 부식제거

및 도장이 필요한 실정임

※ 2021년 이후 겨울철 제설재 사용 및 우기철 강우 등으로 강박스의 부식이 심화된 상태임

○ 보수물량 등 개략공사비 검토

- 램프1구간 강박스 도장 : 471㎡

- 비계설치 : 1,000㎡

- 기타 안전관리시설 등 부대비 1식

- 총 소요예산(개략공사비) : 294백만원

□ 조치방안

○ 시설물 유지관리에 따른 조치계획 보고

- 공단IC 1램프 구간은 2021년 용역이후 겨울철 제설재 사용등으로 인한

녹발생이 심화된 상태임(2022년 겨울철 녹발생 증가)

- 이용시민의 안전확보 및 시설물 유지관리에 따른 조속한 보수가 필요한

실정이나 2022년도 예산편성이 마감된 실정으로,

☞ 금회 추경예산에 반영되도록 요청하여 보수공사를 진행하고자 함.

(소요예산 294백만원)

○ 기대효과

- 중대재해법 시행에 따른 도로시설물 적기보수 및 시민생활 안전확보

- 공단IC 수명연장 및 공용중 유지관리 효과 증대

□ 향후 조치계획

○ 2022. 04월 : 공사 설계 및 발주 (추경예산)

○ 2022. 04월 : 착공

○ 2022. 10월 : 준공