“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2021-2 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사, 1회)

우리 사업소에서 시행하는 『2021-2 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 계약물량 증감 발생에 따른 설계변경 심의위원회를 개최하고 다음과 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 2021-2 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속 단가계약)

나. 계 약 자: *************

다. 공사개요

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
아 스 팔 트(a)	41.00	50.55	증)	9.55
콘 크 리 트(a)	2.00	1.00	감)	-1.00
보 도 블 록(a)	1.30	3.10	증)	1.80
아스팔트 표층(a)	20.00	29.20	증)	9.20

라. 계약기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 6. 29.(총부기기간: 2021. 12. 22. ~ 2022. 6. 29)

마. 설계변경 내역                                                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총부기 계약금액	***********	***********	*	계약금액 변경 없음 (물량 변경)
1차수 계약금액(2021년)	*	*	*
2차수 계약금액(2022년)	***********	***********	*

바. 설계변경 사유: 계약물량 증·감 발생

사. 예산과목

1) 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

2) 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 개조공사비

3) 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

4) 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

5) 재난시스템구축, 소방용수시설관리, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치및보수,시설비 및 부대비

붙임  1. 포장도로 굴착복구공사 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 설계변경 심의의결서 1부.  끝.

급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	채재일		중부수도사업소장	03/23
박동석
협조자	주무관	문정주		주무관	박해옥		주무관	정은희
시행	급수운영과-20108	(	2022.03.23	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)