더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2021년 하반기 하천유지관리 공사(연간단가) 설계변경-제2회(최종)

우리구에서 시행중인 「2021년 하반기 하천유지관리 공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회-최종)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2021년 하반기 하천유지관리 공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2021. 10. 25. ~ 2022. 3. 25.

3. 도 급 자 : 영조건설(주) 대표 윤 명 준

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	693,138,320	686,713,860	감)	6,424,460
도 급 비	624,000,000	623,990,000	감)	10,000
관 급 비	69,138,320	62,723,860	감)	6,414,460

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목

○ 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 하천준설 및 시설물 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(2021년 시비) - 도급비: 200,000,000원

○ 하천 및 하수시설정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하천시설물 관리, 시설비 및 부대비, 시설비(2021년 구비) - 도급비: 260,830,000원

○ 하천 및 하수시설정비, 하천 및 하수시설 유지관리, 하천시설물 관리, 시설비 및 부대비, 시설비(2021년 구비 사고이월) - 도급비: 163,160,000원 (감 10,000원)

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.

4. 설계변경(2회) 검토보고 1부.  끝.

주무관	강충구		치수담당	김재준		치수과장	김윤기		건설교통국장	03/23 이주남
협조자	주무관	이인규		계약담당	신정경		재무과장	강은주
시행	치수과-3989	(		)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3622	/전송		/	rkdcndrn@sb.go.kr	/	대시민공개