“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-5391		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장
			윤태권	우한상		이한규		03/23 代정찬식
등록일자	2022.3.22.
결재일자	2022.3.23.
공개구분	부분공개(5 6)
			협조자		행정국장		양미영
					재무과장		배경숙
					계약팀장		한혜란

『2021년/2022년 제설대책 민간위탁용역(1구역)』

설계변경(총차 및 2차) 시행

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 제설작업 시행에 따른 증․감 사항 반영에 따른 설계변경
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 일반주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

『2021년/2022년 제설대책 민간위탁용역(1구역)』

설계변경(총차 및 2차) 시행

2021년/2022년 제설대책 민간위탁 용역(1구역)-장기계속 사업과 관련하여 비상근무 및 간선 · 이면도로 제설작업에 따른 증・감 사항이 발생하여 설계변경(총차 및 2차)을 시행하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 2021년/2022년 제설대책 민간위탁용역(1구역)-장기계속

□ 용역내용

□ 용역기간: 2021.11.15. ~ 2022. 3. 31.

구 분	총 차	2차
규 모	- 덤프트럭(15톤, 가동, 주간) 366시간 - 덤프트럭(15톤, 가동, 야간) 240시간 - 덤프트럭(1톤, 가동, 주간) 692시간 - 덤프트럭(1톤, 가동, 주간) 672시간	- 덤프트럭(15톤, 가동, 주간) 110시간 - 덤프트럭(15톤, 가동, 야간) 160시간 - 덤프트럭(1톤, 가동, 주간) 436시간 - 덤프트럭(1톤, 가동, 주간) 448시간
계약금액	*************	*************

************************

Ⅱ		보고내용

□ 설계변경 사유

○ 예년에 비하여 잦은 강설(횟수: 8회, 적설량: 18.4cm) 및 제설대책 비상근무(31회)에 따른 장비 · 작업자 대기 및 제설작업 시간 반영

- 제설대책 비상근무 현황

구 분	보강	1단계	2단계	3단계	합 계
비상근무일수	19회	10회	2회	-	31회

○ 제설대책기간 종료 이후 비상근무[2021. 3.19.(토) 00:00 ~ 12:00]에 따른 제설작업을 위한 장비 · 작업자 대기 시간 반영

□ 주요물량 증․감 내용

○ 총차

구 분	단위	수 량			비고
		당 초	변 경	증․감
작업반장(주간)	시간	346	483	증)137
작업반장(야간)	〃	344	388	증)44
덤프트럭(15톤, 가동, 주간)	〃	366	470	증)104
덤프트럭(15톤, 가동, 야간)	〃	240	240	-
덤프트럭(1톤, 대기, 주야)	〃	2,756	3,834	증)1,078
덤프트럭(1톤, 가동, 주간)	〃	692	716	증)24
덤프트럭(1톤, 가동, 야간)	〃	672	672	-

○ 2차

구 분	단위	수 량			비고
		당 초	변 경	증ㆍ감
작업반장(주간)	시간	158	295	증)137
작업반장(야간)	〃	266	310	증)44
덤프트럭(15톤, 가동, 주간)	〃	110	214	증)104
덤프트럭(15톤, 가동, 야간)	〃	160	160	-
덤프트럭(1톤, 대기, 주야)	〃	1,888	2,966	증)1,078
덤프트럭(1톤, 가동, 주간)	〃	436	460	증)24
덤프트럭(1톤, 가동, 야간)	〃	448	448	-

□ 공사비 증․감 내용

○ 총차

(단위: 원)

구 분		변 경	변 경	증 ․감	비고
총 용 역 비		***********	***********	*************
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	*************

○ 2차

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ㆍ감	비고
총 용 역 비		***********	***********	*************
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	*************

□ 예산과목

○ 도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책, 민간이전,

민간위탁금

Ⅲ		조치계획

□ 상기 보고내용과 2021년/2022년 제설대책 종료에 따른 「제설대책 민간위탁용역(1구역)」추진 시 소요된 장비 · 인력 투입사항을 반영하여 설계변경 및 정산 후 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.