투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(새로운 광화문광장 조성사업-자연석판석)

1. 방재시설부-596(2022.01.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 『새로운 광화문광장 재생사업』 에 소요되는 아래 관급자재에 대해 아래와 같이 납품기한 연기 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

▢ 납품기한 연기 요청 내역

납품요구번호	품명	납품기한		납품업체
		당초	변경
12-22-1-06755-00	자연석판석 (T150,고흥석)	'22.03.31	'22.06.30

▢ 변경 사유 : 보완설계 지연 및 지장물 발생으로 공정이 지연됨에 따라 납품기한 연장

붙임 : 분할납품통지서 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	김현곤		공원시설과장	이병호		방재시설부장	03/24
이동훈
협조자	주무관	김희숙
시행	방재시설부-20131	(	2022.03.24	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8683	/전송	02-3708-8756	/	milk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)