문서번호	정수시설과-20037
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
성민제	신왕근	이재복		03/24
				이달영
협 조

2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사

설계변경(최종) 및 계약금액 조정 시행 보고

2022. 3.

광암아리수정수센터

정수시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사』

설계변경(최종) 및 계약금액 조정 시행 보고

“2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사(장기계속단가계약)”의 시공물량 증·감 및 신규 공종 발생 등에 따른 설계변경 및 계약금액

조정을 시행코자 함

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사

❍ 계약기간 : 2021. 9. 7. ~ 2022. 7. 30.

- 1차년도(2021년) : 2021. 9. 7. ~ 2021. 12. 31.

- 2차년도(2022년) : 2022. 1. 1 ~ 2022. 7. 30.

❍ 계 약 자 : *****************

*******************************

********************************

*******************************

*****************************

********************************

********************************

Ⅱ		계약금액 변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 중대재해처벌법 시행 대비 작업장 안전설비 설치에 따른 설계 변경

- 2차년도 공사물량 중 보수공, 부대공 등의 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 설계 변경

- 산재보험료, 고용보험료, 퇴직공제부금 등 사후 정산에 따른 설계 변경

❍ 2차년도 공종별 변경 내역

*****	*******
	***	***	***
***	**********	*********	*************
***	**********	**********	*************
****	**********	*	*************
*******	*	*********	*************
*********	*	**********	*************
************* *************	*	*********	*************
*********** *************	*	**********	*************
********** *************	*	**********	*************
************* ******	*	*********	*************

※ 세부변경 사항 : 따로붙임(설계변경 내역서) - 제경비 및 부가세 제외

❍ 계약금액 변경(조정) 내역

*****		********
		***	***	***
******		***********	***********	*************
*********		***********	***********	*
*********		**********	***********	*************
* * *	****	***********	***********	*************
	*****	**********	**********	*************
	*	***********	***********	*************

Ⅲ		예산활용(안)

❍ 예산활용 근거

- 2022년 광암아리수정수센터 작업장 안전설비 설치 사업 추진 계획 (정수시설과-9114('21.12.20)

⦁본부장 지시사항 : 중대재해처벌법 시행일인 ‘22.1.27일까지 안전설비사업 신속정비 추진

⦁작업장 안전설비의 신속한 설치를 위해서 연간단가 업체((주)엘에스이엔지)에

작업지시하여 사업 추진

❍ 예산활용(안)

- 2차년도 설계변경**************************************

*************************************** 예산 사용

Ⅳ		조치 의견

❍ 금번 2차년도 설계변경 *****************************************************의 예산 사용

❍ 안전조사과-719(2022.01.25.)호“2022년 상수도사업 계약심사 추진 계획”에 의거 설계변경 내역서에 대하여 계약금액 조정 검토 (본부 안전조사과)를 거쳐 설계변경에 반영 조치코자 함.

붙임 : 1. 예산활용 근거 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

4. 고용산재 가입완납증명원 1부. 끝.