문서번호	교통운영과-20268
결재일자	2022. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		신호시설팀장		교통운영과장
김민지		박선영		03/25
				강진동
협 조
	강구조교량팀장				강천수
	교량기획팀장				민형일
	교통시설팀장				서성만

2022년 한강교량 진·출입램프 신호등 설치 계획

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 한강교량 보행자 및 자전거 이용자 안전확보를 위한 -

2022년 한강교량 진·출입램프 신호등 설치 계획

한강교량 진·출입램프의 무신호 횡단보도에 보행자 작동신호기를 설치하여 한강교량을 이용하는 보행자 및 자전거 이용자의 안전을 확보하고, 보행친화 환경을 조성코자 함

보행자 작동신호기 : 보행자가 스스로 버튼을 작동시켜 신호를 요청하는 방식

Ⅰ		사업개요

□ 추진배경

ㅇ 서울시-서울경찰청 정책간담회(2016.5.) 중 한강교량 진·출입 램프 보행환경 개선 협의

- 보행자 횡단 시 차량이 정지하지 않아 신호기 설치를 요청하는 민원 다수 제기

ㅇ 한강공원 및 자전거 이용 시민의 증가로 한강교량 횡단보도 이용자의 안전확보 필요

- 최근 3년간(2018~2020) 한강교량 진·출입램프 사망사고 2건* 발생

* 잠실대교 1건(2018.11. 자전거), 올림픽대교 1건(2020.4. 자전거)

ㅇ 한강교량 진·출입램프 무신호 횡단보도의 보행환경 개선 필요

- 보행자가 횡단 중일 때, 운전자 미양보 비율 95.7% (185대 중 177대)

- 보행자가 횡단보도 대기 중일 때, 운전자 미양보 비율 98.6% (73대 중 72대)

※‘무신호 횡단보도 운전자 일시정지 의무’준수 실태조사 결과 발표 (한국교통안전공단, 2021.5.)

<무신호 횡단보도 일시정지 위반사진>	<무신호 횡단보도 운전자 미양보 비율>

		한강교량 진·출입램프 무신호 횡단보도에 보행자 작동신호기 설치 필요

□ 추진경위

ㅇ 2015.09.   서울경찰청 교통안전시설 심의 완료**************

교 량	총 계	가양대교	마포대교	서강대교	성산대교	양화대교
지점수	**	*	*	*	**	*

ㅇ 2016.04.   서울경찰청 교통안전시설 심의 완료**************

교 량	총 계	한남대교	올림픽대교	잠실대교	천호대교	영동대교
지점수	**	*	*	*	*	*

ㅇ 2016.05.   서울시-서울경찰청 정책간담회(市警 → 市 한강교량 보행환경 개선 요구)

ㅇ 2018.10.   한강교량 보행자 신호등 설치를 위한 보행자, 자전거 통행량 조사

《 한강교량 보행자 신호등 설치를 위한 보행자, 자전거 통행량 조사 결과 》

· 조사대상 : 서울시 관리 한강교량 22개 중 16개 조사

******************************************************************

· 조사기간 : 2018. 6. 25. ~ 9. 7.

· 조사결과 : 차량속도 빠르고 보행자 많아 사고위험 높은 지점부터 우선 설치 필요

구 분	교량 수	한 강 교 량
****	**	*********************************** ********************************************************
*****	**	*********************************** **********************************
****	**	********************************* **********************************
****	**	************* ******************

ㅇ 2019.12.   설치지점(6개 교량 18개 지점) 교통안전시설 변경심의* 및 시공 완료

ㅇ 2020.12.   설치지점(2개 교량 4개 지점) 교통안전시설 변경심의* 및 시공 완료

ㅇ 2021.12.   설치지점(2개 교량 5개 지점) 교통안전시설 변경심의* 및 시공 완료

* ’15~‘16년 규제사항에 대한 보완 및 교통환경 변화에 따른 변경심의 요구

Ⅱ		설치현황 및 추진실적

□ 한강교량 진·출입램프 보행자 작동신호기 설치현황

(단위 : 지점)

연번	교량명	횡단보도	설치대상 횡단보도	보행자 작동 신호기			‘22년 계획 (도기본 포함)	향후 설치 검토 지점	비 고
				계	’21년 이전	‘21년 설치
계		97	77	51	45	6	8	18
1	구리암사대교	3	3	3	3	-	-	-	설치완료
2	광진교	4	4	-	-	-	-	4	후순위
3	천호대교	6	6	6	3	3	-	-	설치완료
4	올림픽대교	6	6	-	-	-	-	6	후순위
5	잠실대교	9	9	7	6	1	2	-	일부설치
6	영동대교	6	6	3	3	-	2	1	일부설치
7	성수대교	6	4	4	4	-	-	-	설치완료
8	동호대교	2	2	-	-	-	-	2	후순위
9	한남대교	6	6	6	6	-	-	-	설치완료
10	반포대교	2	-	-	-	-	-	-	설치제외
11	동작대교	4	-	-	-	-	-	-	설치제외
12	마포대교	8	6	6	6	-	-	-	설치완료
13	서강대교	4	2	-	-	-	-	2	후순위
14	양화대교	10	8	8	8	-	-	-	설치완료
15	성산대교	12	6	2	2	-	1	3	동측제외
16	가양대교	6	6	6	4	2	-	-	설치완료
17	월드컵대교	(3)	(3)	-	-	-	(3)	-	설치예정 (도기본)
18	잠실철교	-	-	-	-	-	-	-	불필요
19	청담대교	-	-	-	-	-	-	-	불필요
20	한강대교	-	-	-	-	-	-	-	불필요
21	원효대교	-	-	-	-	-	-	-	불필요
22	당산철도교	-	-	-	-	-	-	-	불필요
23	행주대교	-	-	-	-	-	-	-	불필요

Ⅲ		2022년 추진계획

□ 설치지점 및 추진방향

ㅇ 설치지점 : 3개 교량 5개 지점[잠실대교(2), 영동대교(2), 성산대교(1)]

< 잠실대교 >	< 영동대교 >	< 성산대교 >

설치 예정

설치 완료

ㅇ 설치내용 : 신호기(차량/보행) 및 보행자 작동신호기, 교통안전표지 설치

ㅇ 추진방향

1단계	▶	2단계	▶	3단계	▶	4단계
현장조사 및 기본설계		(서울지방경찰청) 교통안전시설 심의		기본설계 보완 및 실시설계		(도로사업소*) 교통안전시설 시공
*잠실대교(동부도로, 서부도로), 영동대교(동부도로), 성산대교(강서도로)

□ 설치방안

ㅇ 변경규제 심의 시 램프구간의 특성상 차량 운전자의 시인성을 고려하고 차량 운전자 및 자전거 이용자, 보행자 모두의 안전을 위한 개선방안 적용 필요

- (신 호 등) 경보등 및 보조신호등 설치로 차량 운전자의 시인성 고려

- (보조표지) 차량 운전자에게 전방 신호등이 있음을 알리는 표지 보완

서울경찰청과 사전협의 결과 신호등·교통안전표지 추가 보완 반영

기존 설치계획	▶	변경 설치계획
신호기(차/보) 신설		신호기(차/보) 신설
보행자 작동신호기 신설		보행자 작동신호기 신설, 보조신호등 설치
-		주의표지(125), 보조표지(401) 보완

□ 상세설치(안)

ㅇ 교통안전시설 설치 위치도

잠실대교 북단 1개 지점	잠실대교 남단 1개 지점
영동대교 남단 2개 지점	성산대교 남단 1개 지점

ㅇ 교통안전시설 설치 <예시>

		주의표지(125)()
보행자작동신호기()	보조신호등()	보조표지(401)()

□ 소요예산

ㅇ 2022년 교통신호기 신설 및 보수 재배정(→ 도로사업소) 예산 활용

******************************************

******************************************

********************************

********************************

ㅇ 2022년 교통안전표지 설치 및 유지보수 재배정(→ 도로사업소) 예산 활용

※ 사업소로 기 재배정된 예산을 활용하여 연간단가 사업으로 안전표지 설치

□ 추진일정

구 분	2022년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
현장조사 및 기본설계
교통안전시설 심의(규제)
실시설계
공사착수

※ 영동대교 남단 2곳은 교량안전과 보도 공사기간(5월~6월)과 병행하여 설치 예정

Ⅳ		행 정 사 항

□ 교통안전시설 심의 : 경  찰  청

□ 세부시공계획 수립 시 교량안전과 사전 협의 : 해당사업소

붙 임 : 한강교량 진·출입램프 신호기 설치 및 통행량 현황 1부.  끝.