문서번호	정수시설과-20046
결재일자	2022. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		김기윤	03/25
			문인기
협 조

2021년 전기설비 유지보수 공사(2차수)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 전기설비 유지보수 공사(2차수)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 전기설비 유지보수 공사와 관련하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 사업개요

○ 공 사 명: 2021년 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(2차수)

○ 공사기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 9. ~ 2022. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 계 약 자: ****************

○ 공사내용: 정수센터 전기설비 정비 및 고장 발생시 긴급 보수

□ 심의위원회 개요

○ 일시: 2022. 3. 24.(목) 10:00

○ 장소: 정수시설과 사무실

○ 심의내용

- 설계변경의 타당성

- 제경비 산정 및 적용 적정성 여부

- 물량변동의 적정성 여부

- 각종 제반 규정 준수여부 등

□ 심의결과: 적정함

○ 시공물량 변동 및 제경비 정산에 따른 설계변경이 적정하게 이루어졌음

○ 설계변경에 따른 변경계약 금액 및 기간

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
계약금액	**********	***********	*********
총공사부기금액	**********	**********	*********
공사기간	’22. 1. 1. ~ ’22. 3. 31.		변경없음
총공사기간	’21. 4. 9. ~ ’22. 3. 31.		변경없음

○ 주요 변경내용

- 공사 물량 증가: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 등 11개 공종

- 공사 물량 감소: 접지동봉 설치(Φ16×1800L 1본) 등 192개 공종

- 기타 사항: 물량 변경에 따른 제경비 정산

○ 변경사유: 물량 증감사항 반영 및 제경비 정산

□ 조치의견

○ 심의 결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.