★

문서번호	공원녹지과-5773
결재일자	2022.3.25.
공개여부	부분공개(5)

담 당	공원기획담당	공원녹지과장		도시관리국장
김동영	代김남주	代김용은		03/25 이창구
협 조
	재무과장		강은주
	계약담당		신정경

“천장산 등산로 정비사업”

실정사항 및 설계변경 검토 보고(2차)

2022. 3.

도시관리국

공원녹지과

“천장산 등산로 정비사업”

실정사항 및 설계변경 검토 보고(2차)

우리구에서 시행하고 있는 “천장산 등산로 정비사업” 추진 중 발생한 실정사항건에 대하여 아래와 같이 보고 후 설계변경 시행코자 합니다.

1		공사개요

공 사 명 : 천장산 등산로 정비사업

공사기간 : 2021. 12. 8. ~ 2022. 3. 31.

도 급 비 : 금174,225,640원(금일억칠천사백이십이만오천육백사십원)

도급업체 : ㈜태연에프이씨 대표 전창용

공사내용 : 데크계단(70m) 및 안전난간 설치 등

2		설계변경 사유 및 실정보고

설계변경 사유 : 현장 실정사항 반영에 따른 정비 물량 조정

공 종	검토내용	반영내용	비고
철거공	▶사업대상지에서 연결되는 산책로 노후도가 심각하고 안전상 정비가 시급하여, 산책로 추가 정비구간 철거물량 추가	▶ 공원등 이설 : 1EA → 0EA ▶ 목재난간 철거 : 24경간 → 47경간 ▶ 데크로드 철거 : 28.8M → 37.2M ▶ 데크계단 철거 : 12단 → 48단	현장여건에 따른 반영
시설물공	▶현장여건에 따른 데크로드 및 데크계단에 가림막 설치가 부적정한 대상지에 대한 가림막 설치물량 제외 ▶가림막 설치 제외구간에 대한 난간설치 및 핸드레일 설치 물량 조정 ▶기존 LED램프바를 일부구간만 반영하였으나, 야간 통행시 위험요소가 있어 전체구간에 대한 LED램프바 및 분전함 설치물량 조정 ▶성북구 및 동대문구 산책로 연결부분이 3개의 산책로가 교차하는 구간이나, 공간이 너무 협소하여 쉼터 신설 및 연결부를 넓히기 위해 물량 조정	▶ 데크로드(가림막)[W1500xL1000] : 30.6M → 9.825M ▶ 데크계단(가림막)[W1500] : 127단 → 58단 ▶ 목재가림막 설치(기초)[W1500xH1800] : 59경간 → 8경간 ▶ 가림막 보강 A[W1500xH600~0] : 26EA → 24EA ▶ 가림막 보강 B[W1500xH160] : 20EA → 15EA ▶ 데크로드(목재난간)[W1500xL1000] : 28.8M → 57.02M ▶ 데크계단(목재난간)[W1500] : 12단 → 114단 ▶ 핸드레일 설치(W1500xH1000) : 17경간 → 10경간 ▶ 핸드레일(부착형) 설치(W1500) : 0경간 → 16경간 ▶ LED램프바(L1000) : 46M → 47M ▶ LED램프바 가로목(L1400) : 0경간 → 47경간 ▶ 분전함(LED바 28개 당 1개) : 3EA → 2EA ▶ 데크쉼터(4900*1500) : 0개소 → 1개소 ▶ 삼각데크(500*600) : 0식 → 1식	현장 여건에 따른 반영
기타공 (운반비, 폐기물)	▶노후 데크로드 및 계단 철거물량 증가에 따라 폐기물 처리비 및 소운반비용 조정	▶ 소운반(L=198m, 공사자재) : 23,478kg → 22,476kg ▶ 소운반(L=198m, 폐기물) : 3,344kg → 5,054kg ▶ 폐콘크리트 처리비 : 1.848ton → 2.525ton ▶ 혼합폐기물 처리비 : 1.496ton → 2.528ton ▶ 폐콘크리트 운반비 : 0.8㎥ → 1.098㎥ ▶ 혼합폐기물 운반비 : 0.73㎥ → 1.426㎥	현장여건에 따른 반영
관급자재 (관급자)	▶산책로 연결 및 정비에 따른 공원 안내체계 정비가 필요하여 안내판 물량 조정 ▶현장 여건에 따른 산책로 데크계단 높이가 높아짐에 따라 기존 메시형울타리 높이가 낮아져 안정상 위험으로 메시형울타리 교체 물량 추가	▶ 방향안내판(500x120) : 2EA → 0EA ▶ 구경계안내판(400x1200XH1200) : 1EA → 0EA ▶ 방향안내판(600*150) : 0EA → 1EA ▶ 방향안내판(600*150) : 0EA → 1EA ▶ 방향안내판(600*150) : 0EA → 5EA ▶ 구경계안내판(400x400) : 0EA → 2EA ▶ 종합안내판(2100x1500) : 0EA → 1EA ▶ 메시형울타리(H3000xW2000) : 0경간 → 72경간	현장여건에 따른 반영
관급자재 (도급자)	▶현장 여건 반영에 따른 노후 산책로 교체구간 데크 및 난간 물량 추가에 따른 물량 조정 ▶현장 여건 반영에 따른 목재가림막 설치가 어려운 구간 물량 제외 ▶현장 여건상 핸드레일휀스를 난간 부착형으로 변경하고자 물량 조정	▶하드우드(말라스)[30T] : 167㎡ → 203㎡ ▶ 목재난간(W1500xH1000) : 22경간 → 83경간 ▶ 목재난간기둥 : 2개 → 9개 ▶ 목재가림막(W1500xH1800) : 105경간 → 29경간 ▶ 핸드레일휀스(W1500) : 27경간 → 10경간 ▶ 핸드레일(부착형)[W1500] : 0m → 23.6m	현장여건에 따른 반영

실정사항 검토

공사비 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 공 사 비		281,598,150	281,292,000	감 306,150
도급비	공급가액	158,386,945	171,087,273	증 12,700,328
	부가세	15,838,695	17,108,727	증 1,270,032
	소 계	174,225,640	188,196,000	증 13,970,360
관급자재비		107,372,510	93,096,000	감 14,276,510

예산현황

사 업 명	예 산 액	원인행위액	낙찰차액 및 집행잔액	금회 변경액
천장산 등산로 정비사업	281,598,230원	281,598,150원 (관급자재비 포함)	80원	감 306,150원

※ 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 보전 사업, 근교산 등산로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

3		보고자의견

공사 추진 중 발생한 현장여건 반영사항으로, 상기 보고사항과 같이 시공하고 변경계약하고자 함.

붙  임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부.  끝.