문서번호	건축부-20052
결재일자	2022. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김송희		조승제	03/22
			代차무흥
협 조

『강북노동자복지관 증축및 리모델링 공사』

설계변경(제1회) 및 계약변경 검토 보고

2022.3

『강북노동자복지관 증축및 리모델링 공사』

설계변경(제1회) 및 계약변경 검토 보고

「강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사」의 건설사업관리자로부터 제출된 설계변경(제1회)요청건에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		사업 개요

○ 사업명 : 강북노동자복지관 증축및 리모델링 공사

○ 위    치 : 서울시 마포구 환일길 13(마포구 아현동 711-1)

○ 공사기간 : 2020.12.2 ~ 2022.3.26.

○ 계약금액 :****************

○ 시공자/감리사 : 슈프림건설(주)외 1개사/(주)광장건축사사무소 외 1개사

Ⅱ		추진 경위

○ `20.12.2. : 공사착공

○ `22.2.17. : 설계변경 본부위원회 자문회의 요청

○ `22.3. 3. : 설계변경자문 소위원회(2022-2차)(결과:조건부 가결)

○ `22.3.17. : 설계변경자문 소위원회 지적사항 반영결과 제출

○ `22.3.18. : 설계변경자문 소위원회 반영결과 보고

Ⅲ		설계변경 내용

○ 관련규정 및 근거

- 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 강북복지 제2022-65(2022.03.21.) 설계변경에 따른 계약변경 요청

○ 변경내용

- 계약금액

(단위 : 원)

구 분	당초 (a)	변경 (b)	증 감 (c = b - a)
건축 기계 가스 토목 조경	*************	*************	**	***********

- 계약기간

구 분	당 초	변 경	증 감
총 차	2020.12.2 ~ 2022.3.26	2020.12.2 ~ 2022.3.26	변경없음

- 주요 변경내용 및 사유

구 분	변 경 내 용	사 유	공사비 증감 (단위 : 원)	비고
건축 기계 가스 토목 조경	**************************************	********************	**************	설계변경 자문 소위원회 자문결과 반영 보고 〔건축부-4103(2022,3.18)〕
	****	********	**************	물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(2회) 〔건축부-1075(2022,1.19)〕 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고(1회)〔건축부-13868(2021.9.1)〕
	****	*****************************	************	조경시설물 변경 실정보고 승인 통보 〔도시기반시설본부-22-2856〕
	******	*************************	************	실정보고승인(기계설비공사) 〔도시기반시설본부-22-2902〕
	합계		**************

Ⅳ		건설사업관리단 검토 의견

○ 설계변경 자문회의 자문결과 반영, 조경공사, 기계설비공사의 실정보고건에 대한 설계변경은 검토결과 적정함

Ⅴ		처리의견

○ 책임 건설사업관리기술인 검토 의견과 같이 내용이 적정함에 따라 설계변경 시행코자 함.

붙임 1. 설계변경(총차) 변경계약 요청서류 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 1회 설계변경 내역서 1부.

4. 계약검증확인서 1부. 끝.