문서번호	시설관리과-20252
결재일자	2022. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
김성호	이태형	03/25
		권태규
협 조
	행정지원과장		송종선
	급수운영과장		代이문성
	주무관		조은성

2022년 아리수 음수대 설치 및 유지관리 계획

2022. 3.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 아리수 음수대 설치 및 유지관리 계획

2022년 아리수 음용환경 조성을 위해 학교, 공공기관 등 시민이용이 많은 장소에 음수대를 추가 설치하고 음수대 유지관리 계획을 수립 시행하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진배경

ㅇ 시민들이 수돗물을 안심하고 마실 수 있는 급수여건 조성

ㅇ 추진 근거

‒ 서울특별시 아리수 음수대 설치․관리 및 병물 아리수 사용에 관한 조례

‒ 행정2부시장 방침 제18호(’06.2.3.) “학교 급수시설 개선사업 추진계획”

‒ 아리수 음수대 설치 및 관리 개선대책(’20. 12.)

□ 사업개요

ㅇ 사업기간 : ’22년 1월 ~ 12월

ㅇ 사 업 비 : 130백만원

ㅇ 사업내용

‒ 아리수 음수대 설치

‣ 아리수 음수대 미설치 학교, 국·공립유치원, 공공기관 등 신규 설치

‣ 내용연수(7년) 경과된 노후 음수대 및 고장 음수대 교체

‒ 학교 아리수 음수대 유지관리 시행

‣ 학교 등 음수대 정기적인 유지관리(용역-본부시행)

‣ 학교 음수대 중대한 고장(냉·온기능, 수압기능 이상) 음수대 수리

ㅇ 음수대 현황 : 학교 등 297개소, 음수대 3,738대 (’06년~’21년)

(단위: 개소/ 대)

구 분	계		강북구		노원구		도봉구		비고
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
합 계	297	3,738	80	747	140	1,968	77	1,023
학 교	179	3,440	38	634	98	1,838	43	968
공공기관	81	234	29	91	29	103	23	40
유 치 원	15	40	4	12	6	19	5	9
공 원	22	24	9	10	7	8	6	6	자치구 설치 제외

Ⅱ		추진현황

□ 추진 경위

ㅇ 학교급수시설 개선사업 추진계획 수립(행정2부시장 방침 제18호 ’06. 2.)

‒ 노후 옥내배관 학교 대상 정수기 철거 후 음용수 전용 배관 및 음수대 설치

ㅇ 아리수 음수대 설치 확대 계획(시장방침 제343호, ’08. 6.)

‒ 사업대상을 학교에서 공공기관, 유치원, 공원으로 범위 확대

ㅇ 학교 중심의 아리수 음수대 설치 확대 계획 수립(’11. 3.)

‒ 옥내배관 노후도에 관계없이 모든 학교를 대상으로 설치 범위 확대

ㅇ 서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제정(’15. 1.)

‒ 조례명 개정(’22.1.) : “서울특별시 아리수 음수대 설치ㆍ관리 및 병물 아리수 사용에 관한 조례”

ㅇ 아리수 음수대 설치 및 관리 개선대책 수립(’20. 12.)

‒ 음수대 “설치”⇒“관리” 중심사업으로 전환, 본부 위임관리 연차별 확대 추진

□ ’21년 추진 실적

ㅇ ’21년 아리수 음수대 설치 : 24개소(중복5개소), 음수대 78대

구분		계	신규	추가	교체
					내용연수 경과	고장 등
계	개소	24	5	7	10	2
	대	78	11	35	30	2
학교	개소	17		7	9	1
	대	65		35	29	1
유치원	개소	2	2
	대	5	5
공공기관	개소	5	3		1	1
	대	8	6		1	1

Ⅲ		음수대 설치 계획

□ 수요조사 실시

ㅇ 조사기간 : ’21. 11. ~’22. 1.

ㅇ 조사대상 : 학교, 국·공립유치원, 공공기관 등

ㅇ 신청결과 : 58개소 371대(분수형, 컵사용형 등 4종)

구분		계	신규	추가	교체
					내용연수 경과	고장 등
계	개소	58	3	28	26	1
	대	371	5	51	314	1
학교	개소	45		23	22
	대	344		45	299
유치원	개소	8	3	4		1
	대	11	5	5		1
공공기관	개소	5		1	4
	대	16		1	15

□ 설치대상 선정 : 17개소 71대

ㅇ 기관별 설치

구분		계	신규	추가	교체
					내용연수 경과	고장 등
계	개소	19	1	10	7	1
	대	71	3	14	53	1
학교	개소	14		7	6	1
	대	59		11	47	1
유치원	개소	4	1	3		-
	대	6	3	3		-
공공기관	개소	1			1
	대	6			6

ㅇ 설치대상 선정 기준 (본부 선정)

‒ 복도·식당 등 학생들이 주로 이용하는 장소 우선 설치 및 행정실·교무실 등 컵사용형(舊사무실용) 음수대는 학교별 3대 이내 제한

‒ (신규) 신설 학교 및 국·공립유치원 설치, 공공기관은 공용공간 설치

‒ (추가) 학생이 많이 이용하는 장소(복도, 식당) 위주 설치(학생 수 50명당 1대)

‒ (교체) 내용연수 경과 및 유지관리 용역 결과 음수대 고장 수리를 통해 음수대 지속 사용이 어려운 음수대를 대상으로 선정

□ 추진일정

ㅇ '22. 4.      : 아리수 음수대 조달구매 (본부)

ㅇ '22. 4.      : 배관공사 물량 현장조사 및 예산요청

ㅇ '22. 5. ~ 8. : 배관공사 시행 (학교 여름방학 기간 중)

ㅇ '22. 5. ~12. : 아리수 음수대 설치 (내용 및 교체음수대 우선설치)

Ⅳ		음수대 유지관리 강화

□ 관리기관별 유지관리

ㅇ 유지관리 주체 : 음수대가 설치되어 있는 기관에서 청소, 고장 수리 등 관리

- 관련근거 : 서울시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례 제9조(관리)

ㅇ 실내 음수대 관리(학교․공공기관 등)

□ 학교

- 일상관리 : 설치기관에서 자체적으로 청소 및 고장 유무 확인 등 관리

- 정기관리 : 월 1회 이상 설치기관에서 자체점검 양식에 따라 점검 및 관리하며, 학교및 국공립유치원 본부관리(용역) 시행

① 자체관리 : 음수대 전문 관리인은 없으나, 학교 청소인력을 활용 위생상태 점검

② 본부관리 : 학교 및 국·공립유치원

□ 공공기관

- 일상관리 : 설치기관의 청사관리 업체(청소용역)를 활용하여 청소 등 위생관리

- 정기관리 : 월 1회 이상 설치기관에서 자체점검 양식에 따라 점검 및 관리

ㅇ 야외 음수대 관리(자치구 등)

- “야외음수대 관리 매뉴얼”에 따라 관리기관에서 일상·정기 관리 시행

‣ 야외음수대 점검방법 및 청결관리 기준 등을 명시한 관리매뉴얼을 제작하여, 관리기관에 배포(’20. 1.)

	【‘야외음수대 관리매뉴얼’ 주요 내용】
□ 음수대 관리 ○ 음수대 관리는 설치되어 있는 공원 시설물 관리기관에서 관리 - 자체 관리 계획 수립 및 관리자 지정하고 관리 안내판 부착 - 동절기 음수대 폐쇄(11월 15일 ~ 익년 3월 15일) □ 음수대 점검 ○ 일상점검(매일/수시) 및 정기점검(매주 ~ 월2회 이상) 실시

□  관리기관별 적극적인 운영관리 유도

ㅇ(학교 음수대) 학교장 관심도 제고와 적정관리 협조

- 학교 등 자체 청소용역 과업 및 청소근무자 업무 범위에 음수대 위생관리 포함

- 음수대 전담 관리자(학생, 교직원 등) 지정하여 위생관리 강화

- 음수대 적정 위생관리를 위한 협조 요청 공문 발송

ㅇ(야외 음수대) 야외 음수대 관리매뉴얼 준수

- 음수대 관리매뉴얼에서 정한 위생상태 및 관리상태 점검 확행

‣ 일상점검(수시, 육안점검) 및 정기점검(월 2회 이상)실시

‣ 동절기 음수대 동파 예방조치(음수대 사용중지 11.15. ～ 익년 3.15.)

- 음수대 이력관리 카드, 자체 세부 점검표 작성 관리

- 야외음수대 설치, 철거 등 변경사항 통보 철저(관리기관 ⇒ 해당사업소)

- 야외음수대 관리매뉴얼 기준 준수 및 관리 철저 요청 (매월 1회)

‣ 음수대 관리카드, 자체 세부 점검표 작성 및 점검 등

□  관리실태 점검 유지관리 강화

ㅇ 수질검사 및 관리실태 점검(수도사업소)

- 관할 수도사업소(수질팀)에서 분기별 수질검사와 병행하여 관리실태 점검

‣ 수질검사 실시(1회/분기) : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

☞ 검사 즉시 수질검사결과표에 검사 결과 표기(공개)

☞ 수질검사 및 관리실태 점검 결과를 해당기관에 통보(공문 발송)

‣ 관리실태 점검 : 수질검사시 적출된 고장, 철거, 청결상태 미흡 등 이상 시

☞ 관련기관에 유지관리 및 결함사항 시정 요구(공문 발송)월 1회)

‣ 음수대 관리카드, 자체 세부 점검표 작성 및 점검 등

ㅇ 음수대 유지관리 강화

- 수질검사와 연계한 관리실태 점검, 결과에 대한 조치 관리 강화

‣[1차] 수질검사 시 음수대 관리실태 점검 병행[“별첨1” 자체관리 세부점검표 활용]⇒ 점검결과 통보 및 조치 요청

‣[2차] 개선여부 확인 및 미조치 시 2차 점검 실시 및 조치 재요청

‣‘수질검사 및 관리실명제 표지판’ 일괄 제작·배포 및 수질검사 시 표지판 부착

< 주기적 관리감독 방안 >

음수대 관리실태 파악 (사업소 수질팀)	➡	관리감독 (급수설비과⇒해당기관)	➡	관리감독 (사업소관리부서⇒해당기관)
분기별 수질검사 시 관리실태 점검(1차) - 수질검사 및 점검 결과 통보(→ 관리기관, 사업소, 급수설비과)		음수대 지적사항 조치 요청 - 개선 조치 및 처리결과 제출 요청(7일 이내) - 장기 미조치, 연속 지적 음수대 관리		미조치 음수대 관리실태 점검(2차) - 개선 여부 확인 점검

- 음수대 관리기관과의 협업체계 강화

‣ 음수대 관리 협조 요청 등 주기적인 소통강화로 협업체계를 유지

‣ 자치구 관리부서장 통해 음수대 적정 관리 및 관심 제고 요청

‣ 관리 부실 또는 이용률이 저조한 음수대는 관리기관과 협의하여 철거 추진

□ 추진일정

ㅇ '22. 4. ~12. : 분기별 수질검사 실시

ㅇ '22. 4. ~12. : 수질검사시 적출된 결함사항 시정요구 및 점검

ㅇ '22. 6. ~12. : 관리기관별 자체실시 요청(반기별)

Ⅴ		행정 사항

□ 수질검사와 연계한 관리실태 점검

ㅇ 음수대 수질검사 시 음수대 자체관리 세부 점검표를 활용하여 관리실태 점검 병행

- 수질검사 시 관리실태 점검 병행 및 ‘수질검사 및 관리실명제 표지판’ 부착·교체 - 수질팀

- 관리실태 점검결과 이행여부 현장점검 - 급수운영과, 시설관리과.  끝.